문서번호	건축부-23019
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	의료시설과장	건축부장		시설국장
고병준	정채문	代차무흥		05/13
				권완택
협 조

『삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사 건설사업관리용역』

용역기간 연장(총차, 2차) 검토보고

2022. 5.

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사 건설사업관리용역』 용역기간 연장(총차, 2차) 검토보고

「삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사」관련 건설사업관리단으로부터 용역기간 연장에 대한 실정보고가 제출되어 검토보고 드림

********************

1		용역개요

ㅇ 용 역 명: 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사 건설사업관리용역

ㅇ 위    치: 강북구 미아동 791-2521외 5필지

ㅇ 규    모: 지하2층/지상2층, 전체 연면적 837.27㎡

ㅇ 용    도: 제1종근린생활시설(마을회관), 자동차관련시설(주차장)

ㅇ 용 역 비: **********************************

ㅇ 용역기간: ’20.6.8.~’22.5.14.(2차: ’21.7.1.~’22.5.14.)

2		추진경위

ㅇ '18.9.21.: 삼양동 마을재생 추진계획

ㅇ '19.6.27.: 설계용역 계약 및 착수(주거환경개선과)

ㅇ '20.6.8.: 공사 및 건설사업관리용역 착수

**************************************

**************************************

***************************************

****************************************

ㅇ '22.5.현재: B1~4구역 내·외부마감 및 동·서측도로 부대토목 공사중

3		용역기간 연장 검토

관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약일반조건 제7절 2. 계약기간의 연장(행정안전부예규 제197호, 2022.1.11.시행)

ㅇ 건설사업관리용역 총차 및 2차 용역기간 연장 계약변경 요청(PC22-0442호, 2022.5.11.)

용역기간 연장 사유

ㅇ************************************************  ********************************

ㅇ************************************

계약변경 내용

구 분	당초 (계약기간, 금액)	변 경 (계약기간, 금액)	증∙감
**	*******************	*******************	************* ************* *************
	***********	***********	*********
**	*******************	*******************	**********
	*************	*************	*********

건설사업관리기술인 배치기간 변경사항

ㅇ 총차 배치기간 변경

구 분	배 치 기 간		증 감 (B-A)	비고
	당초(A)	변경요청(B)
******	*************************	*************************	***	***** ******
**	*************************	*************************	*
**	************************* ************************	************************* ************************	*
**	************************ ************************	************************ ************************	***	***** ******
**	************************ ************************	************************ ************************	***	***** ******
**	************************ ************************	************************ ************************	*
**	************************ ***********************	************************ ***********************	*
**	************************	************************	*

ㅇ 2차 배치기간 변경

구 분	배 치 기 간		증 감 (B-A)	비고
	당초(A)	변경예정안(B)
******	*************************	*************************	***	***** ******
**	************************* ************************	************************* ************************	*
**	************************ ************************	************************ ************************	*
**	************************ ************************	************************ ************************	***	***** ****
**	************************ ************************	************************ ************************	***	***** ****
**	************************ ************************	************************ ************************	*
**	************************ ***********************	************************ ***********************	*
**	************************	************************	*

4		검토의견

ㅇ***************************************************

붙 임: 건설사업관리용역 총차 및 2차 용역기간 연장 계약변경 요청 1부.  끝.