문서번호	기전과-22485
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		이지영	05/16
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「구천면로 신호제어기 및 지주 이설 공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5. 16.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

구천면로 신호제어기 및 지주 이설 공사 관련 원인자 설계 변경승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 구천면로 신호제어기 및 지주 이설 공사

ㅇ 공사위치 : 구천면로 323(개나리프라자 빌딩 앞 횡단보도 일대)

ㅇ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 5. 19.

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	****	*******	*******	*******

□ 검토내용

ㅇ 규제심의 : 서울특별시경찰청 교통관리과-24220호(2021.11.01.)

구 분	당 초	변 경
프라자 앞	- 신호제어기 교체 - 가로등주 자리에 차량·보행 신호기 통합 이설	- 가로등주를 통합주로 교체 - 양방향 차량신호등(노란색) 통합주로 이설 - 보행신호기 유지 및 신호지주, 보행신호등(노란색) 교체
프라자 맞은편	- 전주 자리에 차량·보행신호기 통합 이설	- 차량신호기 제거 - 신호지주, 보행신호등(노란색) 교체

ㅇ 변경사항 : 설계도면과 현장여건 상이에 따른 설계변경

구 분	당 초	변 경	증 감 액	비 고
총공사비	**********	**********	***********

□ 검토의견

ㅇ ****에서 시행하는 구천면로 신호제어기 및 지주 이설 공사 관련

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인

서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 공문 1부.

2. 설계도면(변경) 1부.

3. 설계서(변경) 1부.

4. 감리사서류(기술검토의견서) 1부.  끝.