문서번호	도시철도설비부-21901
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
임세윤		구봉서	05/16
			김중영
협 조
	시설전기과장			백성현
	주무관			김윤수
	주무관			민종배

- 진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 신호분야 실시설계 용역 -

과업내용 변경에 따른 설계변경 검토 보고

2022. 05.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 신호분야 실시설계 용역 -

과업내용 변경에 따른 설계변경 검토 보고

「진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 신호분야 실시설계 용역」과 관련하여, 창동차량기지 입출고선 분기기 철거에 따른 노원역 신호설비 개량 과업 추가로 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 신호분야 실시설계용역

□ 과업위치 : 경기도 남양주시 오남읍 양지리 ~ 진접읍 금곡리 일원

□ 과업규모

○ 차량기지(면적 197,400㎡, 건물 14개동, 유치 47편성)

○ 인입선(4.90㎞, 환기구 2개소)

□ 계약금액 : ***************

□ 용역기간 : ****************************

□ 용 역 사 : *****

Ⅱ		추진 경위

□ 2020.04.06. : 실시설계 용역 1차 착수

□ 2020.05.13. : 실시설계 착수보고회 개최

□ 2020.12.31. : 실시설계 용역 1차 준공

□ 2021.01.01.~12.31. : 실시설계 용역 일시 정지

□ 2022.01.01. : 실시설계 용역 2차 착수

□ 2022.04.15. : 실시설계 용역 중간보고회

Ⅲ		검토 내용

*********************************

*********************************************************************************

*******************************

**************************************

***********************************

*********************

***********************************************

□ 노원역 신호설비 개량에 대한 실시설계 과업 추가

○ 현재 진행 중인 실시설계 용역에는 진접차량기지 설계 과업만 포함되어 있어 노원역 신호설비 개량에 대한 추가 설계 과업 필요

○ 과업 추가에 따른 용역 계약변경 필요

Ⅳ		검토 결과

□ 실시설계 과업 추가에 따른 설계변경 필요

○ 창동차량기지 입출고선 분기기 철거에 따른 노원역 신호설비 개량에 대한 실시설계 과업 추가 필요

○ 차량기지 건설 공정관리에 차질이 없도록 용역기간 변경없이 추진

○ ***************************************

※ *************************************

※ 산출근거 : 전력기술관리법 운영요령 제3장 제18조(용역대가의 산출)

(산업통상자원부 고시 제2020-93호, 2020.06.08.)

○ 추가공사비 내용

********************************************************************

*******		*****		**
* * *	****	**	***************
		**	************
	*****		*
	*********	**	***************
************		**	**************
		**	************
*********		**	**************
***		**	***************	********
		**	**************	********
***		**	***************	********

○ 추가공사비에 따른 설계금액 내용

***********************************************************

**************************************

***************************************

*************************************

구 분		금 액		증 감
총 설계용역비		**	***********
		**	***********	**********
도급비	공급가액	**	***********
		**	***********	**********
	부가가치세	**	**********
		**	**********	*********
	손해배상보험	**	*********
		**	*********	*******
	계	**	***********
		**	***********	**********

Ⅴ		행정 사항

□ 용역 설계변경 시행 및 계약변경을 통한 용역 추진

□ 추가 설계용역비는 시설전기과 편성 예산(본예산) 활용

□ 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
용 역 비	************	************	*************
용역기간	******************	******************	****

○	도시철도건설사업비특별회계 – 도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선연장)차량기지 건설, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 창동차량기지 입출고선 철거 범위 1부.

2. 관련 공문(주식회사 경인기술) 1부.  끝.