투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	무대장치 구매설치 설계변경 계약의뢰(시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사)

우리 본부에서 추진중인 「시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사」관련 관급자재 (무대장치 구매설치)에 대한 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 계약변경 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 명 : 무대장치 구매설치(시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사)

2. 계 약 자 : ****************

3. 변경내용

가. 계약 변경금액

계약번호	품 명	계 약 금 액(원)
		당 초	변 경	증 ‧ 감
*************	****	***********	***********	**************

나. 납품기한 변경

계약번호	계약건명	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당초	변경(연장)
*************	****	***********	***********	***********	***********

다. 변경사유 : 운영자 요청사항 반영 및 관급자재 설치여건이 마련되지 않음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 예산과목 : 평생교육국 청소년정책과, 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진, 지역 격차 해소를 위한 균형발전 추진, 시립청소년음악창작센터 건립(균형발전특별회계), 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 관급자재 설계변경 검토보고 1부.

2. 감리단 관급자재 설계변경 요청 공문 1부.

3. 합의각서  1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	박근형		도로설비과장	문학준		설비부장	05/17
김호성
협조자
시행	설비부-23144	(	2022.05.17	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	2014012315@seoul.go.kr	/	부분공개(5)