문서번호	설비부-23193
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
허진		장병선	05/18
			김호성
협조

『노들 남북 고가차도 철거 전기공사』

준공기한 연장 검토보고

2022.  5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『노들 남북 고가차도 철거 전기공사』

준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 『노들 남북 고가차도 철거 전기공사』관련, 준공기한 연장에 대하여 검토하고 보고드림

▶ 준공기한 : 2022.05.31. ⇒ 2022.12.31. (증 214일, 공사비 증감 없음)

□ 공사 개요 : 노들 남북 고가차도 철거 전기공사

❍ 공사위치 : 동작구 본동 159 (노들 고가차도 외 3개소)

❍ 공사규모

- 노들남고가(폭8m, 연장522m), 노들북고가(폭7.5m, 연장461m) 철거

- 가로등 철거 및 설치(45ea), 신호등 설치 3개소, 무인단속장비 3개소

❍ 공사기간 : 2021. 9. 1. ~ 2022. 5. 31.

❍ 공 사 비 : ************

❍ 시 공 사 : 청우전기시스템(주) (감리단: (주)도화엔지니어링 외 2개사)

<위 치 도>
<현 황>	<조 감 도>

□ 관련근거

*****************************************

*********************************************

❍ 공사계약일반조건 제8절 2. 계약의 연장 및 1-다 3항

□ 검토내용

❍ 공사 변경 내용

계약번호	계약자	계약건명	계약금액(원)	준공기한
				당초	변경(연장)
****************	**********	****	***********	**********	***********

❍ 변경 사유

*******************************************************************************

❍ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 계약금액 : 변동없음

□ 건설사업관리기술자 검토의견

❍ 노들 남북 고가차도 철거 착수시기가 '22.6월로 연기됨에 따라
시공사 요청대로 공사기간을 '22.12월로 연기하는 것이 타당하다고 판단됌

□ 보고자 검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리기술인의 준공기한 연장 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어, 전기공사 준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약을 의뢰하고자 함

❍ 향후 일정

- '22. 5.   : 계약변경 의뢰(준공기한 연장)

- '22. 6. ~ : 남북 고가차도 철거 및 전기공사 과업 수행

- '22. 12.  : 공사 준공

붙 임: 감리단 공문(공사기간 연장 검토보고) 1부.  끝.