문서번호	도시철도토목부-22297
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		권순환	05/18
			최병훈
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고 검토

2022. 5

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고 검토

건설사업관리단으로부터 제출된 “터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고”건에 대한 검토보고임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2022-201호(’22.05.16)

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의1. 가의 2)항

- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 98,450백만원 (4차공사 10,709백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (4차공사 ’22.1.1.∼’22.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ 단선터널 암판정

- ’22.02.14. : 상선 STA 0km337.0 [설계 PS-5A ⇒ 적용 PS-4A]

- ’22.02.14. : 하선 STA 0km396.8 [설계 PS-5B ⇒ 적용 PS-4B]

- ’22.03.11. : 하선 STA 0km367.0 [설계 PS-5A ⇒ 적용 PS-4B]

- ’22.03.17. : 하선 STA 0km352.0 [설계 PS-4B ⇒ 적용 PS-4B]

- ’22.04.01. : 상선 STA 0km292.0 [설계 PS-4B ⇒ 적용 PS-4B]

- ’22.04.01. : 하선 STA 0km340.0 [설계 PS-4A ⇒ 적용 PS-4B]

- ’22.04.20. : 상선 STA 0km262.0 [설계 PS-5A ⇒ 적용 PS-4A]

- ’22.04.20. : 하선 STA 0km309.2 [설계 PSU ⇒ 적용 PSU]

ㅇ 복선터널 암판정

- ’22.02.03. : 종점 STA 3km244.0 [설계 PD-5A ⇒ 적용 PD-4A]

- ’22.04.01. : 종점 STA 3km330.0 [설계 PD-4B ⇒ 적용 PD-5A]

- ’22.04.15. : 종점 STA 3km375.0 [설계 PD-5A ⇒ 적용 PD-4B]

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 실정보고 사유

- 암판정 결과에 따른 시공 물량 변경 및 공사비 변경 필요

ㅇ 변경 현황

구 분	당 초			변 경			증 ․ 감
단선터널 <상 선 > 62.4/515.2/154.2 (금회/누계/잔여) <하 선 > 72.0/588.3/201.2 (금회/누계/잔여)	지보패턴	PS-4A PS-4B PS-5A PS-5B PS- U	30.0m 40.2m 49.2m 14.2m 0.8m	지보패턴	PS-4A PS-4B PS-5A PS-5B PS- U	12.0m 122.4m - - -	감) 증) 감) 감) 감)	18m 82.2m 49.2m 14.2m 0.8m
	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 강관다단보강 훠폴링설치	5,534㎥ 685㎥ 1,062개 65조 90공 442개	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 강관다단보강 훠폴링설치	5,648㎥ 737㎥ 1,280개 114조 30공 1,326개	증) 증) 증) 증) 감) 증)	114㎥ 52㎥ 218개 49조 60공 884개
복선터널 124.5/2,480.5/1,495.5 (금회/누계/잔여)	지보패턴	PD-4B PD-5A	45.0m 79.5m	지보패턴	PD-4B PD-5A	61.5m 63.0m	증) 감)	16.5m 16.5m
	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 훠폴링설치	9,250㎥ 607㎥ 1,009개 30조 690개	수량	터널 굴착 숏크리트 타설 락볼트 설치 격자지보 훠폴링설치	9,310㎥ 633㎥ 1,049개 41조 943개	증) 증) 증) 증) 증)	60㎥ 26㎥ 40개 11조 253개

ㅇ 단가 적용 현황

- 기존 계약내역의 물량증감에 대해 기계약 단가 적용

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위:천원)

구 분	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 단선터널	*********	*********	**	******
2. 복선터널	*******	*******	**	******
▸직접공사비 계	*********	*********	**	******
▸제 경 비	*******	*******	**	******
▸공 급 가 액	*********	*********	**	******
▸도 급 액 계	*********	*********	**	******
▸관급자재비	*******	*******	**	*****
▸폐기물처리비	******	******	**	***
▸총 공사비	*********	*********	**	*******

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 수시로 변하는 지반상태와 작업자의 안전을 고려하여 현장에서 건설 사업관리단 주관하에 적정한 패턴으로 변경하였으며 패턴변경 구간, 연장 등 적용범위 확인

- 공사계약 일반조건 제7절 1항에 의거 변경되는 공사비*************는 추후 설계에 정산 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의 “터널 암판정 결과 반영 관련 실정보고”건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고져 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.