문서번호	건축기획과-24184
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	05/18
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
용산구 갈월동 98-6 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 지상철 인접 구간에 위치한 지중경사계의 관리 기준치는 가시설 흙막이 구조물 자체의 안정뿐만 아니라 지상철 노상의 안전이 더 중요하므로 지상철의 허용 변위값을 관리 기준으로 적용하기 바람. - 굴착에 의한 선로 안전대책(궤도 및 노반 침하 계측)으로 노반침하계를 계획하였으나, 선로(궤도레일)에 직접 고정하여 선로 침하를 자동으로 정확하게 측정하는 레일 장착식 레일변위 측정시스템의 적용을 검토하기 바람. - 해체계획서와 지하층 현황 측량조사 결과를 제출하고 현장 내부 기존 건축물 지하구조체의 위치관계 및 철거현황을 조사 후 신설 흙막이와 간섭여부를 확인하기 바람. - 기존 건축물의 지하구조체가 내부에 잔존하는 경우 이를 도면화(평면 및 단면도) 후 흙막이 설계의 구조안전성 및 시공방안에 대해 검토하고 시공사로 하여금 관련사항을 인지하여 관리할 수 있도록 조치하기 바람.	‘22년 제4차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.03.10.: '22년 제4차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.05.04.: 이행결과 검토 요청(주택공급과→건축기획과)

○ ’22.05.04.~05.18. : 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	- 이행결과가 적정함을 확인함.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	- 국가철도시설물에 대한 계측관리에 만전을 기하여 안전시공하기 바람. - 지하굴착을 위한 흙막이, 차수, 역타슬래브지지 공사의 진행에 따라 토질 및 기초분야 전문가(기술사 이상)를 위촉하여 정기적인 계측관리분석 및 평가자문을 통하여 안전시공이 이루어질 수 있도록 하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 주택공급과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’22년 제4차 굴토 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.