문서번호	한양도성도감-21811
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		이원재	05/18
			김홍진
협조
	도성정책팀장		윤선희

전시관리실 설계자 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

문  화  본  부

(한양도성도감)

전시관리실 설계자 자문회의 결과 보고

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

한양도성도감과장:김홍진☎2133-2650 도성관리팀장: 이원재☎2670 담당: 왕승찬☎2671

전시안내센터의 건축공사중 자재선정 및 공법보완 등에 대하여 설계자의 자문을 받고 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진배경 및 공사현황

□ 목적

ㅇ 건축가의 설계의도를 반영하여 공공건축물의 디자인 및 품격향상

ㅇ 공사진행중 마감재 변경 및 하자예방 검토

□ 추진근거

ㅇ 공공건축의 설계의도 구현을 위한 설계자 자문계획

(한양도성도감-20170, 2022.3.28.)

□ 공사현황

ㅇ 사 업 명: 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성사업

ㅇ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지

ㅇ 공사기간: 2018.11.23. ~ 2022.9.20.

ㅇ 문화재수리업자: 원택건설(주), 명헌건설(주)

ㅇ 문화재감리업자: (주)금성종합건축사사무소

ㅇ 추진경위

《1차계약분 공사완료-2020.7.2.》

- 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 관람데크 143m, 성곽 멸실구간 형상화 74m

- 토목공사 및 배수공사, 조경공사, 성곽 및 배전터 유구 보존처리

《2차계약분 공사진행중》

- '22.3월   공사재개

- '22.5.3.   벽체 및 지붕콘크리트 타설

Ⅱ		설계자 자문결과

□ 개 요

ㅇ 일  시: 2022.5.11. 14:00 ~ 17:00

ㅇ 참석자: 설계자 윤종수(서울시 공공건축가)

상주감리원*****, 현장소장******외1

한양도성도감(도성정책팀장, 도성관리팀장 외3)

□ 자문안건

자 문 내 용		자 문 결 과
도성정책팀 제안	전시공간 바닥마감재 변경 가능여부 설계: 데코타일 → 변경: 포세린타일	· 포세린 타일은 미끄러짐에 주의하고 전시공간 및 관리실 전체 구간 동일자재로 변경 · 천정재와 등기구는 전시업체가 전시의도에 적합하게 설치
	전시공간 천정마감 및 등기구 설치제외 향후 전시설계업체가 전시계획 의도에 맞춰 전청재 및 등기구를 선정·설치토록 함
도성관리팀 제안	지붕 방수층 보강방안 지붕층 잔디식재에 따른 누수 등 하자예방	· 건물규모에 적정한 방수공법이 적용되어 있으나 하자예방을 위해 방수층 보강 (지붕층, 흙에 묻히는 외벽: 쉬트 전시실 내벽: 시멘트 액체방수) · 건물 우측 지표면을 1m정도 낮추어 조성(습기예방)
	전시공간 습기관리 방안 전시공간 외벽이 흙에 묻혀 습기에 취약함 ※ 감리자 제안내용(내벽 시멘트 액체방수 추가) 포함

Ⅲ		조치계획

ㅇ (도성정책팀) 포세린타일 샘플선정 · 결정(6.30.한)

전시업체 선정후 천정재, 등기구 설치여부 재협의(5.31.한)

ㅇ (도성관리팀) 지붕층, 흙에 묻히는 외벽에 방수층(아스팔트 쉬트) 추가

흙에 묻히는 전시공간 내벽에 시멘트 액체방수 추가

건물우측부 지표면을 1m정도 낮추어 공사토록 요청

ㅇ 추가 공사 및 변경공사 내용은 향후 실정보고 승인 및 설계변경 절차를 거쳐 처리하고자 함.  끝.