투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(조명기구) 납품기한 연기의뢰(동북권 아동청소년예술교육센터 건립 전기공사)

우리 본부에서 추진 중인 「동북권 아동청소년예술교육센터 건립 전기공사」에 소요되는 관급자재(조명기구)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 세부내역

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명	계 약 금 액 (원)	납 품 기 한
			변경전	변경후
*********** **************	*********	**********	***********	***********
*********** **************	*********	**********	***********	***********
*********** **************	**********	*******	***********	***********

나. 연기사유 : 선행공종(건축) 일정에 따른 설비분야 관급자재 납품시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	이정훈		건축설비과장	배수웅		설비부장	05/19
김호성
협조자
시행	설비부-23335	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	ljh0447@seoul.go.kr	/	부분공개(5)