투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서 울 대 공 원
수신	총무과장
(경유)
제목	2022년 서울대공원 산책로 정비사업 준공기한 연기 의뢰

1. 조경과-21832(2022.05.17.)호와 관련입니다.

2.「2022년 서울대공원 산책로 정비사업」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니

처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2022년 서울대공원 산책로 정비사업

나. 도급금액 : *********************************

다. 공사기간 : *********************

라. 계약업체 : 주식회사 태아 / 대표 임희정

마. 준공기한(변경) : **************

*********************

바. 연기사유 : 현장여건 변경에 따른 절대공기 부족

사. 귀책소재 : 서울대공원

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 및 합의각서 각 1부.  끝.

	조 경 과 장
주무관	이보인		주무관	代이보인		조경과장	05/19
구동근
협조자
시행	조경과-21935	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, (막계동, 서울대공원)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7993	/		/	부분공개(5)