문서번호	운영과-21568
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	05/19
			代오근
협조	주무관		김윤경
	주무관		김영현

북서울미술관 밀폐형냉각탑 보수공사 준공정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

북서울미술관

(운영과)

북서울미술관 밀폐형냉각탑 보수공사 준공정산 보고

'북서울미술관 밀폐형냉각탑 보수공사' 공사계약과 관련하여 준공 및 정산사항이 발생하여 관련 내용을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 검사원지정요구서(북서울미술관 밀폐형냉각탑 보수공사 계약_완수) (총무과-22219호, 2022. 5. 16.)

□ 공사개요

○ 계 약 명: 북서울미술관 밀폐형냉각탑 보수공사

○ 공사내용: 밀폐형냉각탑 80CRT 열교환코일 8개소 및 하부수조 교체

○ 계약금액: **********************

○ 공사기간: 2022. 3. 18. ~ 5. 16.

○ 시 공 사: ******************

□ 추진경위

○ 2022. 3. 18. ~ 3. 24. : 공사계약 및 착수회의

○ 2022. 3. 25. ~ 5.  6. : 부품제작 및 압력시험

○ 2022. 5. 10. ~ 5. 16. : 철거·설치 및 시운전

□ 준공내용

○ 시험성적서(붙임4) 및 정상 시운전 확인되어 준공처리 하고자 함.

냉각탑 코일 8개소(4개소×좌·우 2면) 설치	스테인리스 하부수조(배관포함) 설치

○ 보험료(건강·연금·노인) 등 제경비를 사용하지 못한 부분 정산하고자 함.

계약건명	계약금액	준공금액	증·감액
북서울미술관 밀폐형냉각탑 보수공사	***********	***********	**********

□ 처리의견

○ 위 준공금액으로 준공감독조서 작성 및 총무과 발송

- 보험료(고용·산재) 납부서류 및 안전관리비 사용내역 확인(붙임4)

붙임  1. 계약내역서 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 작업사진 1부.

4. 부품(냉각탑 코일) 시험성적서 1부.

5. 보험료 납부서류 및 안전관리비 사용내역 각 1부.  끝.