문서번호	설비부-23306
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로설비과장		설비부장
박근형		문학준		05/19
				김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기,통신공사』

준공기한 연장 검토 보고

2022. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기,통신공사』

준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 전기,통신공사』준공기한 연장에 대하여 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 공사(전기,통신)

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	***** **********	**	***********************	*************
		**	***********************	*************
******	**** ***	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

○ ***********************************

2		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 전기공사 준공기한 연장 검토 보고 [시립CM제2022-139호 ('22.05.17.)]

○ 통신공사 준공기한 연장 검토 보고 [시립CM제2022-145호 ('22.05.19.)]

3		검토내용

○ 변경내용

계약번호	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
**************	****	***** ****** ***	**	*************	***********	***********
			**	*************	***********	***********
**************	******	*******	**	***********	***********	***********
			**	***********	***********	***********

○ 변경사유

- 선행공종(건축) 준공기한 연장에 따른 후속공종(전기,통신) 준공기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공종(건축) 준공기한 연장으로 후속공종(전기,통신) 준공기한 연장이 적정하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 전기,통신공사 준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.