문서번호	시설과-20735
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
김경원	이종무	05/19
		代이종무

- 2022년 남산공원 산사태 예방공사 -

준공기한 연기 검토 보고

2022. 5.

중부공원녹지사업소

(시   설   과)

- 2022년 남산공원 산사태 예방공사 -

준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 추진 중인 「2022년 남산공원 산사태 예방공사」와 관련하여 준공기한 연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토보고 드림.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2022년 남산공원 산사태 예방공사

❍ 위    치 : 북측순환로 등 5개소(중구 예장동 산5-6 외 2개소)

❍ 공사내용

- 토공 및 철거공 : 절토면 고르기 2,660㎡ 및 수목 제거 등

- 구조물공 : 낙석방지책 80m 및 낙석방지망 2,021㎡ 등

- 식재공 : 조팝나무 식재 및 식물매트 등

- 폐기물처리 : 폐콘크리트 21톤, 임목폐기물 22톤 등

❍ 공사기간 : 22. 3. 4. ~ 5. 29.(87일간)

❍ 계약업체 : **************

❍ 총공사비 : *************

********************************************

□ 준공기한 연기검토

❍ 준공기한 연기내역

- 당   초: 2022. 3. 4. ~ 5. 29.

- 변   경: 2022. 3. 4. ~ 6. 17.(19일 연기)

❍ 연기사유: 장충동 산14-48 산사태취약지역 추가공사 시행에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 준공기한 연기[※시설과-20404호(2022.04.21) 참조]

❍ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 보고자 의견

❍ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.  끝.