더불어 행복한 스마트포용도시 성동
			성동구
수신자		(주)삼표산업 대표이사 윤인곤 귀하(03152 서울시 종로구 종로1길 42, 이마빌딩)
(경유)
제목	성수동 삼표레미콘 공장 자진철거 촉구

1. 귀 사가 2017년 10월 서울시 및 우리구와 체결한 ’4자 협약’ 및 2022년 3월 개최한 ‘성수 공장 철거 착공식’을 통해 서울시민에게 공식적으로 약속한  ‘2022년 6월말 까지 공장의 자진 철거’ 사항과 관련입니다.

2. 귀 사에서 착공신고 시 제출한 철거 일정에 따르면 공장 전체 철거를 2022년 6월 30일까지 계획하고 있으나, 현재까지 철거 진행률이 저조하고 가시적 성과가 확인되지 않아 당초 계획한 6월 말까지 철거 완료가 우려되는 실정인 바, 대시민 약속으로 공표한 철거 기한인 2022년 6월 30일까지 공장 철거가 차질 없이 완료될 수 있도록 추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 실제 철거 착수 시점이 다소 지연된 점을 감안하여, 1·2공장에 대한 세부 철거 일정 및 공장 레미콘 생산 종료 계획 등을 포함한 구체적 철거 계획서 제출을 요청하오니 2022. 5.25.(수)까지 우리구로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	성동구청장
주무관	이윤지		도시관리팀장	김기한		도시계획과장	김영훈		도시관리국장	05/19 김영식
협조자	건축과장	이경도
시행	도시계획과-6146	(		)	접수		(		)
우	04750	서울특별시 성동구 고산자로 270	/	http://www.sd.go.kr
전화	5875	/전송		/		/	대시민공개