문서번호	급수운영과-23781
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
전유섭		이문성	05/23
			代이문성
협 조

보  고  서

(급수공사비 환불)

2022. 05.

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 노원구 지역담당 업무수행 중 다음과 같이 급수공사비 환불사유가 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

2022. 05. 23. (월)

보 고 자: 지방시설서기보시보 전 유 섭

□ 현 황

○ 건축물 현황

- 주  소: **************

- 용  도: ************

- 규  모: *****************

○ 급수공사 현황

- 지시번호: 신설-112, `22.05.20.(금) 작업완료

- 지시내용(당초): 기존관 철거(D80/20, 새들잠금) 후 D80/20 부단수분기하여 인입관 매설(D20, L=2.6m) 및 ********************************** 설치

- 작업내용(변경): 기존관(D20)재용 및 옥내 내부분기(20/15, 이경티) 하여 보호통(15mm, 일반) 추가설치 및 기존 보호통(15mm, 가정) 교체

□ 보고내용

○ 당초 지시내용대로 기존관 철거후 새로이 분기 및 인입관 매설 예정(D20, L=2.6m)이었지만 기존관 재사용으로 인하여,

○ 배수관 분기없이 내부분기 작업으로만 진행되어 공사비 부과에 변동사항이 생김.

□ 조치의견

○ 2022. 05. 23.(월) 민원인과 유선으로 공사내역 및 비용부과 변경사항을 설명하였고, 납부했던 금액과의 차액을 환불하고자 함.

성 명	수요가 부담금(원)				비고
	구 분	공 사 비	원인자부담금	계
*****	***	*********	*********	*********	******** **************
	***	*********	*********	*********
	*	********* ****	*	********* ****

끝.