문서번호	시설보수과-21910
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
전휘기		안준수	05/23
			김영철
협조
	주무관		김종성

충정교 보수공사(장기계속)(1차)

준공기한 연기 검토 보고

2022. 5.

서부도로사업소

시 설 보 수 과

『충정교 보수공사(장기계속)(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

우리 사업소에서 시행하는 「충정교 보수공사(장기계속)(1차)」와 관련하여 서울시설공단(공사감독2처)의 준공기한 연기 요청에 따른 검토 보고임.

※ 관련 근거 : 서울시설공단 공사감독2처-3549(2022.5.13.)호

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 충정교 보수공사(장기계속)

□ 공사기간: 2021.12.06. ~ 2022.12.31.(1차분 2022.5.31.)

□ 공 사 비: 금1,152,661,570원(1차분: 금420,193,570원)

□ 공사개요

- 탄성받침(68개소) , 신축이음(92m) , 교면방수 및 포장(476㎡)

미끄럼방지포장(249㎡) , 단면보수(171㎡) , 교량난간(32m)

□ 도 급 사: ㈜케이엔지니어링 대표이사 권 우 현

□ 발 주 청: 서부도로사업소(시설보수과)

Ⅱ		검 토 내 용

가. 공정 현황

❍ 현 공정율 : 14%(2022.5.13. 기준)

❍ 작업 완료사항 : 교량인상(A2)

❍ 잔여 작업사항

- 교좌장치 콘크리트깨기 및 설치

나. 준공기한 연기 요청 사항(도급사)

❍ 준공기한 연기 사유

○ 철도 관련 연기 (87일)

1. 국가철도공단 선로작업계획 사전협의로 인한 착공지연

(협의기간 2022.1.20. ~ 2022.3.4.) : 42일

- 2022. 1월20일 ~ 31일 철도공사 선로작업계획 사전협의 ►11일 부족

- 2022. 2월 철도공사 선로작업계획 사전협의 ►28일 부족

- 2022. 3월1일 ~4일 철도공사 선로작업계획 사전협의 ►3일 부족

2. 한국철도공사 선로협의로 인한 월별 작업일수 부족 : 45일

- 03월 : 16일 작업승인 ► 15일 부족

- 04월 : 16일 작업승인 ► 14일 부족

- 05월 : 15일 작업승인 ► 16일 부족

❍ 준공기한 연기 요청일

- 당 초 : 2021.12.06. ~ 2022.05.31.

- 변 경 : 2021.12.06. ~ 2022.07.30.(60일 연장)

다. 준공기한 연기일수 검토

○ 철도 관련 연기 (51일)

1. 국가철도공단 철도보호지구 행위신고협의로 인한 착공지연 : 22일

- 2022. 3월 4일 국가철도공단 협의완료

※ 당초 예정공정표 1월 협의완료 → 2월분 작업일수 적용 : 22일

2. 한국철도공사 선로협의로 인한 월별 작업일수 부족 : 29일

- 03월 : 16일 작업승인 ► 월간 작업일수 25일중 9일 부족

- 04월 : 16일 작업승인 ► 월간 작업일수 26일중 10일 부족

- 05월 : 15일 작업승인 ► 월간 작업일수 25일중 10일 부족

○ 준공기한 연기 일수 산정

- 관련근거 : 공공 건설공사의 공사기간 산정기준[국토교통부고시 제2021-1080호]

공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간

62일 =   0일   +   51일   +   11일   +   0일

⇒ 준비기간 : 0일

⇒ 작업일수 : 51일

‣‘22.6월(24일), 22.7월(26일), 22.8월(1일)

※ 작업일수 : 당해 공사의 공종별 수량을 시공하는데 필요한 절대 작업일수

⇒ 비작업일수 : 11일

‣ 22.6월(6일), 22.7월(5일)

※ 비작업일수 : 법정공휴일

⇒ 정리기간 : 0일

라. 검토 결과

❍ 공사기간 산정 적정성 검토

- 국가철도공단과의 “철도보호지구 행위신고 조건부 수리 및 통보” 시설관리처-5285(2022.03.04.) 협의일수 소요 및 한국철도공사와의 운행협의에 의거 월별 감안하여 검토한바, 작업일수 51일은 연기 가능하며,

- 시공 품질확보 및 안전한 공사 운영을 위해 “공공 건설공사의 공사기간 산정기준”에 의거 비작업일수 11일을 연기 가능함.

❍ 상기 검토 내용과 같이, 총 공사기간은 62일 연기가 가능하나 도급사 요청내용과 같이 2022.07.30.까지(60일) 공사기간을 연장하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

마. 조치 계획

❍ 준공기한 연기 : 총 60일

구 분	기 간
당 초	2021.12.06. ~ 2022.05.31.
변 경	2021.12.06. ~ 2022.07.30.

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 귀책사유 : 없음

Ⅲ		조 치 사 항

❍ 상기 보고 내용과 같이 공사기간 연장이 필요한 실정이므로 준공기한 연기 조치하고자 함.

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2022. 5월 중 : 변경계약 체결(준공기한 연기)

❍ 2022. 7월 중 : 공사 준공(1차)

붙임 : 서울시설공단 공문 1부.  끝.