문서번호	도시철도설비부-22196
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박상규		장석춘	05/23
			김중영
협 조
	송변전과장			전계목
	시설전기과장			백성현
	차량과장			배광희
	설비공사과장			이광주
	정보통신과장			김이곤
	신호과장			代이원호

신림선 경전철

예비준공검사 등 지적사항 조치 완료 보고

2022. 5. 20.(금)

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

신림선 경전철

예비준공검사 등 지적사항 조치 완료 보고

신림선 예비준공검사 등 외부기관 지적사항에 대한 조치결과를  다음과 같이 보고 드림.

□ 추진내용

○ 설비분야 예비준공검사 : '22. 2. 15. ~ 2. 24.

- 주관 : 도시철도설비부, 도시철도과

○ 외부전문가 및 시민모니터링단 점검 : '22. 3. 15.

- 주관 : 도시철도사업부

○ 장애인단체(지체, 시각장애인협회) 점검 : '22. 2. 18. ~ 2. 22.

- 주관 : 도시철도건축부

○ 설비분야 시운전(성능테스트) : '22. 4. 26. ~ 5. 6.

- 주관 : 도시철도설비부

○ 감사위원회 시민 불편사항 현장 점검 : '22. 5. 4. ~ 5. 6.

- 주관 : 감사위원회 조사담당관

□ 지적사항 현황

구 분	합계	전기/ 소방	기계. 소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/ 검수	기타
합 계	506	89	307	7	14	45	4	30	10
예비준공검사	361	71	229	4	14	22	4	17	-
시민모니터링단	7	-	3	-	-	4	-	-	-
장애인단체	61	5	36		-	17	-	3	-
시운전(성능테스트)	13	5	-	3	-	-	-	5	-
감사위원회 현장점검	64	8	39	-	-	2	-	5	10

□ 지적사항 조치결과

○ 예비준공검사

구 분	합계	전기/ 소방	기계/ 소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/ 검수	기타
지적사항	361	71	229	4	14	22	4	17
조치완료	319	70	193	4	12	22	4	14
불가 및 타분야	42	1	36	-	2	-	-	3
미 조 치	-	-	-	-	-	-	-	-

- 주요 불가사항 : 덕트의 재질 변경 (아연도→스테인레스)

세부 장비번호 부여 (운영사 처리사항)

장비의 위치 변경 (현 시점 이동 불가)

○ 시민모니터링단

구 분	합계	전기/ 소방	기계/ 소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/ 검수	기타
지적사항	7	-	3	-	-	4	-	-
조치완료	7	-	3	-	-	4	-	-
불가사항	-	-	-	-	-	-	-	-
미 조 치	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 장애인단체(지체, 시각)

구 분	합계	전기/ 소방	기계/ 소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/ 검수	기타
지적사항	61	5	36		-	17	-	3	-
조치완료	58	5	34	-	-	16	-	3
불가사항	3	-	2	-	-	1	-	-
미 조 치	-	-		-	-	-	-	-

- 주요 불가사항 : 음성유도기 위치 변경(장애인단체 요구사항으로 설치)

승강기 수평손잡이는 출입문 방향이 달라 연속설치 불가

○ 설비분야 시운전(성능테스트)

구 분	합계	전기/ 소방	기계/ 소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/ 검수	기타
지적사항	13	5	-	3	-	-	-	5
조치완료	13	5	-	3	-	-	-	5
불가사항	-	-	-	-	-	-	-	-
미 조 치	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 감사위원회 시민불편사항 현장점검

구 분	합계	전기/ 소방	기계/ 소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/ 검수	기타
지적사항	64	8	39	-	-	2	-	5	10
조치완료	52	7	29	-	-	2	-	5	10
조치불필요	12	1	10	-	-	-	-	0	-
미 조 치	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 주요 조치 불필요 사항

· 심장제세동기 미비치 : 운영사 조치사항, '22. 5. 26.까지 비치 예정

· 바닥 배기관 돌출 : 사업시행자 수익시설 설치 예정으로 존치

□ 향후 추진사항

○ 설비의 장애율을 낮추기 위한 지속적 점검 실시

- 시민 편의시설 점검 : '22. 5. 23. ~ 5. 24.까지

- 주요 시설물 순회 점검 실시 : '22. 5. 25. ~ 개통 시 까지

- 점검 결과 미흡사항 적출 시 현장조치 시행

붙임  1. 신림선 도시철도 예비준공검사 조치결과 제출 (대용량 첨부).

1-1. 차량분야 예비준공검사 지적사항 및 조치결과- (대용량 첨부).

2. 신림선 시민 모티터링 지적사항 조치 결과 (대용량 첨부).

3. 신림선 장애인단체 현장점검 조치결과(취합분) (대용량 첨부).

3-1. 신림선 장애인단체 현장점검 차량분야 조치결과(차량) (대용량 첨부).

4. 감사위원회 시민편의 점검결과 지적사항(조치결과 양식) (대용량 첨부).

4-1. 감사위원회 시민편의 점검결과  지적사항(조사4팀) 조치결과.  끝.