코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰(서울특별시 자연재해저감 종합계획 수립 용역)

1. 하천관리과-23390호(‘22. 5. 23.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 “서울특별시 자연재해저감 종합계획 수립 용역”에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

계약건명		서울특별시 자연재해저감 종합계획 수립 용역(강남지역)	서울특별시 자연재해저감 종합계획 수립 용역(강북지역)
계약업체		㈜건화 대표 홍경표 외 3	㈜유신 대표 박석성 외 3
총차 계약	계약금액	금 2,070,600,000원	금 2,293,374,000원
	착수일	2020.5.29.	2020.5.29.
	준공일	2022.5.28.	2022.5.28.
2차 계약	계약금액	금 870,600,000원	금 1,093,374,000원
	착수일	2021.1.1.	2021.1.1.
	준공일	2022.5.28.	2022.5.28.

나. 변경내용

구 분		당 초	변 경	사 유
계약기간	총차	’20.5.29.~ ’22.5.28.	’20.5.29.~ **********	*************************************************************
	2차	’21.1.1.~ ’22.5.28.	’21.1.1.~ **********
계약금액		변경 없음

붙임 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 각 1부.  끝.

	하 천 관 리 과 장
주무관	조현범		치수총괄팀장	代조현범		하천관리과장	05/23
손경철
협조자
시행	하천관리과-23398	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길, 15, 서울시청 서소문별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	badahorange@seoul.go.kr	/	부분공개(5)