문서번호	기전과-22858
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		이지영	05/24
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「위례신도시 택지개발사업 전기공사

(위례 1단계 교통신호)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5. 24.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

위례신도시 택지개발사업 전기공사(위례 1단계 교통신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 위례신도시 택지개발사업 전기공사(위례 1단계 교통신호)

- 교차로명 19개소(트램교차로1, 트램교차로2, 트램교차로3, 위례스타힐스1,

위례스타힐스2, 송파더센트레, 차고지입구, 위례24단지, TCP-1-1,

TCP-1-1-1, TCP-1-2, TCP-1-3, TCP-A5, TCP-A6, TCP-1-4, TCP-1-5,

TCP-1-6, TCP-1-7, TCP-1-8)

ㅇ 공사위치 : 송파구 위례신도시 택지개발지구 1공구

ㅇ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 11. 2.

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	********	******************	********	*******

□ 추진경위

ㅇ 2015.08.06. : 원인자부담공사 승인요청****************

ㅇ 2015.09.16. : 승인처리(13개 교차로, 2단계 3개 교차로 포함)

ㅇ 2015.12.10. : 공사기간 변경요청****************

- 공사기간 승인일 ~ 2015.10.15. → 승인일 ~ 2016.12.31.

ㅇ 2015.12.10. : 변경 승인처리

ㅇ 2016.10.13. : 원인자부담공사 승인요청****************

ㅇ 2016.10.17. : 승인처리(7개 교차로)

ㅇ 2017.09.18. : 원인자부담공사 승인요청****************

ㅇ 2017.09.20. : 승인처리(2개 교차로)

ㅇ 2017.10.30. : 원인자부담공사 준공승인 요청****************

ㅇ 2017.11.01. : 사전 합동검사 시행

- **************************************

ㅇ 2017.12.26. : 1단계 구간 합동검사 시행

ㅇ 2018.01.09. : 승인처리 된 13개 교차로, 7개 교차로 공기연장

- 공사기간 승인일 ~ 2016.12.31. → 승인일 ~ 2019.02.28.

- 공사기간 승인일 ~ 2016.12.31. → 승인일 ~ 2018.01.31.

ㅇ 2018.02.02. : 택지개발사업(1단계) 준공공고(국토부공고제2018-112호)

ㅇ 2019.06.05. : 승인처리 된 13개 교차로, 7개 교차로, 2개 교차로 공기연장

- 공사기간 승인일 ~ 2016.12.31. → 승인일 ~ 2020.04.30.

- 공사기간 승인일 ~ 2016.12.31. → 승인일 ~ 2020.04.30.

- 공사기간 승인일 ~ 2018.08.28. → 승인일 ~ 2020.04.30.

ㅇ 2020.05.20. : 공기 및 준공기한 연장

- 공사기간 승인일 ~ 2020.04.30. → 승인일 ~ 2021.04.30.

ㅇ 2020.10.30. : 택지개발사업(2단계) 준공공고(국토부공고제2020-1403호)

ㅇ 2021.06.08. : 공기 및 준공기한 연장

- 공사기간 승인일 ~ 2021.04.30. → 승인일 ~ 2022.04.30.

ㅇ 2022.03.08. : 위례신도시 책임감리원 변경

ㅇ 2022.03.08. : 시공사 변경*******************

ㅇ 2022.04.25. : 위례신도시 1단계 구간 인계인수 요청

****************

ㅇ 2022.05.04. : 위례신도시 1단계 구간 전기요금 명의변경 요청

****************

ㅇ 2022.05.10. : 위례신도시 2단계 구간 인계인수조서 제출 및

합동검사 요청****************

ㅇ 2022.05.25. : 위례신도시 2단계 구간 합동검사 예정

□ 준공검사 및 지적사항 조치

ㅇ 합동점검결과

- 근거 : 기전과-16672호(2017.12.26.), 기전과-16713호(2017.12.27.)

□ 준공승인 및 검토사항

ㅇ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	차량신호등	신설	LED, 1면4색	77조
	차량신호등	신설	LED, 1면3색	92조
	보행신호등	신설	LED, 1면2색	19조
	보행신호등보조장치	신설	경찰청규격	92대
	시각장애인용음향신호기	신설	경찰청규격	92대
	신호제어기	신설	경찰청규격	19대
	핸드홀(교통신호기용)	신설	800*800*800	72식
	제어용케이블	신설	F-CVV, 2.5mm, 5C	12144m

ㅇ 검토사항

구 분	검토사항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정
	차량/보행등 정상 작동상태 확인	적정
	차량/보행등 지주 설치(수평)상태 확인	적정

□ 검토의견

ㅇ 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자 준공승인 요청 공문 1부.

2. 준공감리조서 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공내역서 1부.

5. 준공계 및 준공검사원 1부.

6. 준공사진(별첨) 1부.  끝.