문서번호	기술심사담당관-23840
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축심사팀장	기술심사담당관
이광백		박노산	05/24
			이임섭
협조

- 월곡 복합문화센터 건립공사 -

설계경제성(VE)검토 실행계획

2022. 5.

기술심사담당관

- 월곡 복합체육센터 건립공사 -

설계경제성(VE) 검토 실행계획

「월곡 복합체육센터 건립공사」에 대한 설계경제성(VE) 검토를 위하여 설계경제성검토소위원회를 구성·운영하고자 함.

※ 추진근거 : 2022년 설계경제성(VE) 검토 운영계획(행정2부시장 방침 제16호)

1		추진 근거

□ '22년 설계경제성 검토 운영계획(행정2부시장 방침 제16호, '22.1.27.)

□ 서울특별시 설계경제성 검토 운영지침('22.1.27.)

□ 설계경제성(VE) 검토 요청(성북구 건축과-15924, '22.5.18.)

2		심사 요청 개요

□ 요청부서 : 성북구 건축과

□ 위    치 : 서울시 성북구 하월곡동 67-39외 7필지

□ 공사기간 : '22. 10. ~ '24. 10.

□ 사 업 명 : 월곡 복합체육센터 건립공사

□ 공 사 비 : *********

위 치 도	조 감 도

3		운영협의회 협의결과

□ 운영협의회 검토회의 개요

○ 일    시 : '22. 5. 24.(화) 10:00

○ 장    소 : 기술심사담당관 회의실

○ 검토위원 : 기술심사담당관(위원장), 건축심사팀장(간사)
조경심사팀장, 설비심사팀장(위원)

○ 검토결과

-「건설기술진흥법 시행령」에 의거한 설계경제성(VE) 검토 대상

사업(총공사비 100억원 이상)이므로 검토함이 타당함

□ 운영협의회 협의결과 : 기술심사담당관 위탁검토 시행

4		설계 경제성검토 계획

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진 방법: 설계경제성검토 소위원회를 구성하여 검토

○ 설계경제성 검토 소위원회, 발주부서, 설계사 등 참여

구 분		소 속		성 명		비 고
업 무 총 괄		위원장	기술심사담당관	이임섭		․ 설계경제성(VE) 검토 계획 수립 ․ 회의 지원
		간 사		박노산
		담당자		이광백
발주부서		성북구 건축과 공공기획담당팀장		이정화		․ 사업설명, 제안서 검토
설 계 사		(주)관동건축사사무소		엄영섭		․ 사업설명서 준비 ․ 제안서 원가분석 등
- 검 토 위 원 구 성 -
구 분		위원구성				비 고
리 더		한국가치기술연구소			허재영	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원		한국가치기술연구소			유대한	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성 보조
검토위원	건축 계획	㈜단우에이앤에이건축사사무소			김연호	․ 기능분석 ․ 기술검토 ․ 아이디어 제안 및 평가 ․ 제안서 작성
	건축 구조	비에스파트너스 구조기술사사무소			송병석
	건축 시공	㈜브이원텍			연성흠
	기 계	㈜경기기술단			황철호
	전 기	동부엔지니어링㈜			강태은
	토 질	㈜엘메스코리아			김종석

□ 설계VE 회의 세부일정

구분	일 시	추진내용	비고
1일차	6.8.(수) (10시~17시)	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석(회의 : 대면 / 답사 : 대면)
2일차	6.16.(목) (10시~17시)	- 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가(대면)
3일차	6.24.(금) (10시~17시)	- 구체화 검토 및 발표, 아이디어평가(대면)
-	6.31.(목)	- VE 제안서 통보 및 채택여부 요청(기심→발주부서)
-	7.7.(목)	- VE 제안 채택결과 회신(발주부서→기심)
-	7.14.(목)	- 설계경제성(VE) 검토 결과 통보(기심→발주부서)

※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

5		행정사항

□ 소요예산 : 10,931,930원

○ VE리더(특급기술자+보고서 작성)	:  2,620,900원

○ 진행보조요원(중급기술자)	:    869,150원

○ 검토위원(특급기술자)	:  6,941,880원(1,156,980원 × 6명)

○ 회의다과비 등 운영비                :   500,000원

□ 향후 추진계획

○ 설계경제성(VE) 검토결과서 통보('22.7월 중)

붙임  1. 설계경제성(VE) 검토 신청서 1부.

2. 설계도서 1부(별도첨부).  끝.

붙임  1. 설계경제성(VE) 검토 신청서_월곡 복합체육센터 1부.