문서번호	기전설비과-21042
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김상동	05/24
			박상보
협조

여의도샛강 수중펌프 3호기 정비공사 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 05.

시 설 부

[기전설비과]

여의도샛강 수중펌프 3호기 정비공사

설계변경 검토 보고

여의도샛강 유지유량 확보 및 인공연못 유지 용수용 수중펌프의 정비공사 시행 중 설계변경 사항에 대하여 검토 보고드림

□ 공사현황

○ 대상설비 : 여의도샛강 수중펌프 3호기

○ 계약금액 : 금19,785,000원(금일천구백칠십팔만오천원정)

○ 공사기간 : 2022.5.9~2022.5.28

○ 계약업체 : **************

□ 설계변경 내용

구분		공사비(원)		증감
		당초	변경
도급액	공급가액	**********	**********	△********
	부가세	*********	*********	△*******
	합 계	**********	**********	△********

○ 변경사유 : 간접노무비 요율변경 및 정산

- 간접노무비 13% → 12.5%(2022.4.25)적용기준 요율변경

- 산업안전보건비 미사용

○ 변경금액

□ 보고자 의견

○ 검토결과 간접노무비 적용기준 요율변경과 산업안전보건비 미사용분을       정산 감액하여 변경계약 하는 것이 적정하다고 판단됨

□ 향후계획

○ 총무과에 설계변경 계약의뢰 및 준공검사 진행

붙임   1. 변경내역서  1부

2. 합의각서 1부

3. 원가계산 검증확인서 1부. 끝.