문서번호	공원녹지정책과-22957
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
이승동	박철수	이승복		05/24
				유영봉
협 조

서남권역 공원녹지 네트워크 조성

기본계획 용역 기간연장 검토보고

2022. 5.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서남권역 공원녹지 네트워크 조성

기본계획 용역 기간연장 검토보고

서남권역 공원녹지 네트워크 조성 기본계획 수립용역과 관련하여 용역사로부터 기간연장 요청사항을 검토하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서남권역 공원녹지 네트워크 조성 기본계획 용역

○ 용역기간 : ***********************************

○ 용역금액 : **********

○ 용역수행 : *****************

○ 주요내용 : 서남권역 공공용지 공원화 가용지 대상지별 기본계획 수립

주요 공원 및 녹지 등을 연결하는 네트워크 구상 등

Ⅱ		추진경위

○ '21. 05. 26. : 서남권역 거점 휴식공간 조성 추진계획 수립

○ '21. 09. 07. : 대상지 선정 자문회의에 따른 14개소 선정 완료

○ '21. 10. 08. : 용역 입찰공고(제안서평가)

○ '21. 11. 24. : 용역 계약(협상에 의한 계약) 및 착수

○ '22. 01. 27. : 통합워크숍 및 1차 중간보고(비대면 화상회의)

○ '22. 05. 13. : 부서장 보고회의

○ '22. 05. 19. : ******************

착수보고회	현장조사	부서장 보고

Ⅲ		요청사항 검토

□ 용역기간 연장

○ 당    초 : **************************

○ 변    경 : **********************************

○ 연장사유

- *************************************** *****************************************

- ******************************************* **************

□ 검토의견

○ *****************************************************************

○ *********************************************

Ⅳ		향후계획

○ *********************************************

○ **********************************************

○ ******************

붙임 1. 과업 기간연장 신청 공문 및 사유서 각1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.