문서번호	토목부-23939
결재일자	2022. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
이승주	황윤기	05/25
		하현석

실정보고(철골공사 수량 변경 등) 검토 보고 [신림공영차고지(저류조포함) 조성공사]

2022. 5.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사 -

실정보고(철골공사 수량 변경 등) 검토 보고

『신림공영차고지(저류조포함) 조성공사』와 관련하여 철골 공정의 설계서 불일치로 인한 수량 변경 및 현장여건 등을 반영한 실정 검토보고임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고(철골공사 수량적용 오류수정)(신림차고지(감)제2022-088호, '22.05.06.)

□ 공사계약 일반조건 제19조2(설계서의 불분명ㆍ누락ㆍ오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사

□ 규    모 : 주차장(버스 101대), 빗물저류조(35,000㎥)

□ 기    간 : 2018.10.01. ~ 2023.12.31.(4차 2022.1.1.~12.31.)

□ 공 사 비 : 35,125백만원(4차 5,000백만원)

□ 시 공 사 : 삼영종합건설㈜ 외 2개사

□ 감 리 사 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

Ⅲ		검 토 내 용

□ 실정보고 검토

○ 철골 수량 변경

- 변경 내용 : 수량 산출 오류로 인해 수량산출서, 내역서, 도면 수량이 상이하여 설계도면에 내역서를 일치

※ 설계사 의견 : 철골 가공조립, 자재, 볼트 수량은 도면과 같이 변경함이 타당함(유신구조-22-3172)

공 종	단위	수 량			비 고
		수량산출서	내 역 서	도 면
*******	***	*****	*****	*****
*********	***	*****	*****	*****
********	**	******	******	*******

- 주요 수량 증감

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증·감
*******
*******	************	***	********	********	*******
	********	***	******	******	******
******		***	********	********	*****
*********	******* ************	***	********	********	*****
***************	*****	**	******	******	***
**************
***********	***********	***	******	******	*****
********************	***	***	********	********	******
*******	**************	**	******	*	*******
*********	***********	**	*	*******	*******	********* ****
********	****************	**	******	******	***

주1)「고장력 볼트 변경 승인」(도기본21-6548, '21.6.16. )

; 고장력 6각볼트와 TS볼트는 기계적 성질이 동등하고, 시공성 및 안전성 확보를 위해 TS볼트로 변경

○ 용접 및 용접검사 수량 변경

- 변경 내용 : 공사시방서(3.1.2 공장용접, 3.2.4 현장용접) 규정에 따라 제작은 공장용접, 현장설치시 이음부는 현장용접을 적용하고, 비파괴 검사를 공사시방서(3.10.3 비파괴 검사의 적용범위) 기준으로 변경(당초 수량산출 오류)

※ 설계사 의견 : 현장용접과 공장용접으로 구분하여 산출하는 것이 타당함(유신구조-22-3172)

****	*********	**********
****		*****************

- 주요 수량 증감

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증·감
*******
********		*	******	*****	*******
********	************	***	*	*******	*******	**
	********	***	*	******	******	**
*******	*********	*	*****	*****	***
	********	*	*****	**	******

○ 철골도장 수량 변경

- 변경 내용 : 철골과 콘크리트 슬래브 면이 접하는 도장 수량 공제(당초 수량산출 오류)

※ 설계사 의견 : 철골도장은 콘크리트 타설부위를 제외하고 수량을 산출하는 것이 타당함(유신구조-22-3172)

****	****	****	***
***
****	*******	*******	*********

○ 기둥철근 커플러 적용

- 변경 내용 : 기둥내부 철골(H-Beam) 외부에 기둥철근이 감싸고 있어 철골Base Plate 볼트 조임을 위하여 기둥철근 절단 후 커플러 체결하여 철근 연결 필요

※ 설계사 의견 : 기둥 철골조립시 시공성 및 작업공간 확보를 위해 철근절단 후 커플러 체결하여 철근연결하는 것이 타당한 것으로 판단됨(유신구조-22-3172)

****	****	****	***
*** ****
****	*	**************************	**

□ 공사비 검토

○ 기존비목******************

○ 신규비목************************************

발주처(안)	시공사(안)	적용	비고
***********	********	***********	**************

***********************************

**********************************************

**********************************************************

○ 공사비 증감 현황                                                   (단위 : 원)

구 분			당 초	변 경	증.감	비고
*******			*************	*************	***********
* * *	* * * *	*****	*************	*************	*********
		***	*************	*************	*********
		****	***********	***********	***********
		*	*************	*************	***********
	***		***********	***********	**********
	****		*************	*************	***********

Ⅳ		조 치 의 견

□ 구조물 공종인 철골공사의 설계도면(시방서)와 내역서 수량이 서로 상이하여 공사계약 일반조건 제19조2에 의거 설계서간의 상호모순을 제거하고자 설계도면(시방서)과 내역서를 일치시키고 기 실정보고 승인사항 등을 반영한 사항으로 건설사업관리기술인 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 승인코자 함.

붙임  실정보고서 1부.  끝.