문서번호	시설관리과-25336
결재일자	2022. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
천웅민	이유찬	05/25
		김상웅
협 조

「덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」

시공계획서 및 품질시험계획 검토 보고

2022.  5.

중부수도사업소

(시설관리과)

「덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」

시공계획서 및 품질시험계획 검토 보고

「덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 시공계획서 제출 및 품질시험계획 승인 요청에 대한 검토 보고 후 승인코자 함.

1		공사현황

ㅇ 사 업 명: 덕성여중 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2022.05.11.~ 11.30.

ㅇ 도 급 액: ************

ㅇ 도 급 자: ************

2		검토 사항

□ 검토내용

구분	검토내용		공단 지시내용	사업소 검토결과
	항목	결과
공사 세부공정표	-공사기한 내에 공정의 순서, 일정 및 계획 작업량의 적합성 검토	- 일일 인력 및 장비투입 계획 작성 - 계획 작업량 적정	-공정계획대로 인력,장비,자재 준비 철저 -계획비 10%이상 지연시 부진공정 만회대책 제출	보완
주요 공정별 시공절차 및 방법	-주요공종 시공방법에 대한 도면 과 시방서 일치여부 -필요시 시험시공 및 시공상세도 제출 및 적정성 검토	-주요공종 시공방법 적정 - 해당없음	-시공전 단수,공사안내 -교통개방시간 준수 -단수시간 준수 철저 -설계변경시 실정보고 및 승인 후 공사시행	원안시행
인력,자재,장비 투입계획	-인력,자재,장비 투입에 대한 계획 확인 -예정공정표 적정성 검토 및 필요시 추가투입계획 검토	-현장에 맞는 장비,자재, 인력 투입계획 작성 -필요시 추가투입 검토 예정	-자재 적기투입위해 사전준비 철저 -관급자재 대체시 사용승인 요청 철저	보완

구분	검토내용		공단 지시내용	사업소 검토결과
	항목	결과
안전관리 대책	-가이드라인에 의거, 심사한 안전 관리대책 적정여부	-공사 특성에 맞는 안전관 리대책 작성, 사전 심사완료 -재난대책 시나리오, 최초 위험성평가 작성	-단계별 상황 및 근무요령 교육 철저 -안전시설물 설치 철저	보완
환경관리 대책	-공사장주변 환경관리대책	-비산먼지,소음,진동 등에 대한 대책작성 적정	-환경민원 예방 사전조치 -에어방음벽 등 필요시 검토	원안시행
품질시험 계획	-품질관리 기구조직 -공종별 품질시험계획	-품질시험계획 작성 적정 -품질관리자 품질관리 전문 교육 미이수	-주요공정별 검측서 사전작성, 준비 -작업내용 매일 공유 -6월 중 품질관리 전문교육 이수, 증빙제출	보완
최초위험성평가서	-작업과 관련있는 위험요소 선정 적정성 -위험요인의 감소대책 적정성	-서울시설공단 매뉴얼에의거 최초위험성 평가서 작성 적정 -위험요인 감소대책 적정	-위험성평가서에 입각한 일일 안전교육 실시 -위험요인 사전 제거활동 철저	원안시행
기타 공사추진에 필요한 사항	-감독자가 공사추진과 관련, 필요한경우 추가 자료 제출토록 지시하고 검토	-공사추진과정에 따라 필요 사항 추가제출 예정		원안시행

ㅇ 보완사항

- 공사 세부공정표: 공사일정 변동 시 수정 공정표 제출

- 안전관리대책

· 관리감독자 지정하여 공사장 안전관리 철저

· 수시 위험성 평가를 실시하고, 허용 가능한 위험성을 초과하는 경우

개선대책 수립 및 개선결과표를 제출하고, 개선이 완료된 상태에서

작업 시행할 것

· 위험성 평가시 '아리수 위험성평가 SMART 표준안' 적용

- 품질시험계획 : 기간내 품질관리 전문교육 이수 후 증빙자료 제출

- 최초 위험성평가서

· 각 위험요인별 위험성 감소대책에 대한 개선기한 설정 및 개선결과표 제출

· 위험성 평가 작성시 관리감독자 서명 첨부

3		조치계획

ㅇ 상기와 같이 시공계획서 및 품질시험계획서 검토결과 보완사항에 대하여 서울시설공단으로 통보하여 보완하는 것으로 조건부 승인하고자 함.

붙 임 : 시공계획서 검토보고서 및 품질시험계획 승인 요청  1부. 끝.