문서번호	건축부-23712
결재일자	2022. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이랑		이문희	05/25
			신명승
협조	장애인이용시설팀장		강준민
	주무관		정남훈

『시립발달장애인복지관 별관 건립 설계용역』

용역기간 연장 검토보고

2022. 5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립발달장애인복지관 별관 건립 설계용역』

용역기간 연장 검토보고

『시립발달장애인복지관 별관 건립 설계용역』 관련, 다음과 같이 BF예비인증 심의일정 지연에 따른 업무지연으로 용역기간 연장(증 35일)코자 검토보고 드림.

1		용 역 개 요

□ 용 역 명: 시립발달장애인복지관 별관 건립

□ 위    치: 동작구 여의대방로20나길 39(보라매공원내)

□ 사업내용

*******************************************

*********************************

***************************

*************************

***************************

*****************************

2		추진경위

□ 2021.09.01.: 설계용역 착수

□ 2022.02.28.: 설계용역 1차수 준공

□ 2022.04.26.: 용역기간 연장(증 30일)

※ 사유: 도시공원심의 조치계획 업무협의 지연

□ 2022.05.25.: 용역기간 연장 요청(증 35일)

3		용역기간 연장 검토

□ 용역기간 연장 사유

*************************************************

***********

*********************************************************************************************************************************************************************************

□ 귀책사유: 해당없음

□ 지체상금 부과여부: 미부과

4		검토의견

□ 용역사로부터 제출된 검토보고 내용이 적정하므로 용역기간 연장 처리코자 함.

붙 임: 변경 계약요청 공문 1부.  끝.