투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(여의도샛강 수중펌프 3호기 정비공사)_협조결재 추가

1. 기전설비과-21042(2022.5.24)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「여의도샛강 수중펌프 3호기 정비공사」에 대하여 아래와 같이      설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기바랍니다.

가. 공 사 명 : 여의샛강 수중펌프 3호기 정비공사

나. 공사기간 : 2022.5.9 ~ 2022.5.28

구분		공사비(원)		증감(원)
		당초	변경
도급액	공급가액	17,986,900	17,469,800	△ 517,100
	부가세	1,798,700	1,746,900	△ 51,800
	합 계	19,785,600	19,216,700	△ 568,900

다. 계약업체 : ***************

라. 계약금액 : 금19,785,600원(금일천구백칠십팔만오천육백원정)

마. 변경사유 : 간접노무비 적용기준 요율변경 및 경비 미사용에 따른 변경

바. 설계변경내용

붙임  1. 여의도샛강 수중펌프 3호기 정비공사 설계변경 검토 보고 1부.

2. 변경내역서_여의샛강 수중펌프 3호기 정비공사 1부.

3. 변경 합의각서 1부.

4. 원가계산 검증확인서 1부.

	기 전 설 비 과 장
주무관	김재규		기전설비과장	05/25
김상동
협조자	주무관	안미희		기획예산과장	代이경춘
시행	기전설비과-21065	(	2022.05.25	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	부분공개(7)