투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-23963호(2022.5.25.)호와 관련입니다

2. 우리 부에서 시행 중인「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계외 1건」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역외 1건

나. 용역규모 : 서부간선도로 일반도로화, 친환경공간 조성 109,000㎡

다. 설계변경내역

구 분	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계 건설사업관리용역
용역기간	당초 : '20.02.29.~'22.05.31. 변경 : '20.02.29.~'22.08.31.	당초 : '19.8.29.~'22.05.31. 변경 : '19.8.29.~'22.08.31.
용역금액	686백만원(변경없음)	193백만원(변경없음)
용역사	㈜유신, ㈜도화엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아,㈜경동엔지니어링, ㈜도진엔지니어링	㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

라. 설계변경사유

- ***************************************************************************

마. 예산과목 : 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기신청서 및 합의각서 각 1식. 끝.

	토 목 부 장
주무관	김종혁		토목설계과장	한병찬		토목부장	05/26
하현석
협조자
시행	토목부-23993	(	2022.05.26	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로, 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)