문서번호	토목부-24003
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이동섭		한병찬	05/26
			하현석
협조
	주무관		이보람

탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계

건설사업관리용역 일시중지 검토보고

2022. 05.

도시기반시설본부

(토목부)

탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계

건설사업관리용역 일시중지 검토보고

동남권사업과에서 시행중인 「탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계용역」 일시 정지에 따라 효율적인 사업추진을 위한 설계단계 건설사업관리 용역 일시 중지 등 후속 추진사항에 대한 검토보고임.

□ 관련근거

○ 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계용역 일시정지 알림

(동남권사업과-21440호(2022.05.16.))

- ******************************

< 설계 주요 추진현황 >

- '20. 04. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- '20. 10. ~ 11. : 지역수자원위원회 자문, 경관심의(조건부)

- '21. 03. : 설계경제성(VE)검토, 민간투자사업 시설배치 재검토

- '21. 08. ~ 12. : 설계용역 일시정지

- '22. 04. : 잠실 야구장 위치 결정에 따른 도로개선 선형 변경

□ 건설사업관리용역 개요

○ 용 역 명 : 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계감리)용역

○ 규    모 : 강변정비(국제교류복합지구 주변 탄천·한강 합수부일대 63만㎡)

탄천보행교 신설(폭 15m, 연장 280m)

○ 용역기간 : 2020. 11. 2 ~ 2022. 8. 12

(※ ********************************)

○ 계약금액 : 353,602천원

○ 용 역 사 : ㈜유신 외 2개사

□ 추진경위

○ 2020.02. : 기본 및 실시설계용역 시행(동남권사업과)

○ 2020.06. : 건설사업관리 용역 시행 의뢰(동남권사업과➝도기본)

○ 2020.11. : 실시설계 단계 건설사업관리 용역 착수

○ ***************************************

- ***************************************

○ ****************************************

- **************************************************************************

○ 2022.05. : 설계용역 일시정지 통보(동남권사업과➝도기본)

□ 보고내용 및 검토의견

○ 동남권사업과에서 진행중인 ‘탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계용역’이 일시 정지 통보됨에 따라 설계단계 건설사업관리용역 과업 중지기간 연장 등 후속 업무 추진이 필요하며,

○ 향후 설계용역 재개 및 실시설계 이관 등 과업 추진 가능 사유 발생 시 즉시 건설사업관리 용역 재개하고, 준공기한은 잔여일수를 포함 실시설계 기간을 반영하여 추후 연장 검토

□ 조치계획

○ 건설사업관리용역 과업 일시 중지

- ***********************************

- 중지사유 : 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계용역 일시 정지에 따른 설계단계 건설사업관리용역 일시 중지

※ 향후 용역 추진 가능 사유 발생 시 즉시 재개 예정

○ 향후 용역 재개 시 조치사항

- 준공기한 ‘22.8.12(당초) ➝ 잔여일수 포함 실시설계 기간 반영하여 연장 조치

□ 행정사항

○ 용역 일시정지 통보 : 건설사업관리사업자(유신), 총무부

붙임 : 설계용역 일시정지 알림(동남권사업과) 1부.  끝.