문서번호	설비부-23771
결재일자	2022. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이정훈		배수웅	05/27
			김호성
협조

동북권 아동청소년예술교육센터 건립 통신공사』

관급자재 계약변경 검토보고

2022. 5.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『동북권 아동청소년예술교육센터 건립 통신공사』

관급자재(구내방송장치) 계약변경 검토보고

우리 본부에서 시행 중인 『동북권 아동청소년예술교육센터 건립 통신공사』와 관련하여, 소요되는 관급자재(구내방송장치)의 계약변경을 하고자 함.

공사현황

❍ 사 업 명: 동북권 아동청소년예술교육센터 건립 통신공사

❍ 위    치: 서울특별시 강북구 미아동 811-2

❍ 사업기간: ************************

❍ 감 리 단: ************

관련근거

❍ 관급자재 납품기한 연기요청(동북권CM 제22-119, 121)

❍ 동북권 예술교육센터 건립 공연장 설계변경 요청(문화시설과-21403)

❍ 물품 다수공급자 계약특수조건 제25조, 제26조

검토내용

❍ 계약현황

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명	계 약 금 액 (원)	계약자	납 품 기 한
*********** **************	****** ******	***********	*******	***********
*********** *************	******	**********	*******	***********

❍ 계약변경 사유

- 문화예술과, 문화시설과 블랙박스 공연장 구내방송장치 변경요청

- 기존 설계된 음향설비를 무대공연에 적합한 제품으로 변경

❍ 계약변경 내용

공 종 명		당 초	변 경	증감액(원)	계 약 번 호 (납품요구번호)
****	***	***********	***********	**********	*********** **************
	***	**********	**********
	******	********	********
****	***	**********	**********	**********
	***	**********	**********
	******	********	********
****		***********	***********	**********

❍ 납품기한 연기 사유

- 선행 공종(건축) 일정에 따른 설비분야 관급자재 납품시기 미도래

❍ 납품기한 연기내용

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명	계 약 금 액 (원)	납 품 기 한
			변경전	변경후
*********** **************	****** ******	***********	***********	***********
*********** *************	******	**********

감리단 검토의견

❍ 검토의견

- 주관부서 요청사항 반영을 위해 블랙박스공연장 구내방송장치 변경이 필요함.

- 선행공정인 토목굴착공사 지연 등으로 불가피하게 통신공사 1차수 와 총차 공사기간이 연장되었으므로, 관급자재 납품기한을 변경하는 것이 타당하다 사료됨.

보고자 검토의견

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 계약변경 및 납품기한 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임: 감리단 요청 공문 2부.  끝.