“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(4회, 최종) 시행 및 계약의뢰(2021년 광진구 관내 상수도공사)

우리 사업소에서 시행하고 있는 「2021년 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)」와  관련하여 아래와 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2021년 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

2. 계 약 자: (주)이안건설 대표 조종래

3. 공사기간: 2021. 4. 19.~22. 6. 3.

4. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 · 감(원)	비 고
도 급 비	925,879,100	1,244,800,000	증)318,920,900

5. 변경사유: 현장여건 변화에 따른 신규공종 발생, 공종별 시공물량 증‧감

6. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사비)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 지원사업성시설비(보온재정비)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(소블록물세척)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용 배급수관 정비)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(대형 상수도관 세척)

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	김선찬		급수운영팀장	代강무진		급수운영과장	유동수		동부수도사업소장	05/27
이재호
협조자
시행	급수운영과-24963	(	2022.05.27	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2742	/	sg1174@seoul.go.kr	/	부분공개(6)