코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	교통영향평가 개선방안 검토 진행사항 보고((구)서울애니메이션센터 재건축사업)

「서울애니메이션센터 재건축사업」(공사)설계용역 및 교통영향평가 개선방안 마련에

따른 관계자 검토(또는 실무회의 등)를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검토내용 : 건축설계 진행(건축계획)에 따른 교통개선대책 등 개선안 마련

*****************************************

나. 추진사항

ㅇ '22. 1. 25  : 교통영향평가 대상에 따른 교통영향평가 대행자 선정 요청******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ '22. 2. 16  : 교통영향평가 용역 계약 및 착수(6.30 용역 준공)

ㅇ '22. 3. 25  : 교통영향평가 보고서 제출(→ 교통정책과)

ㅇ '22. 4. 20  : 교통영향평가서 관련 대안마련 검토회의************

**************************************************

ㅇ '22. 4. 21  : 교통영향평가 보고서 보완 요청(교통정책과 → 미디어콘텐츠산업과)

ㅇ '22. 4. 25  ~  5.13 : (도기본)사전검토 의견 설계보완(※ 설계자, 감리자 검토)

ㅇ '22. 4. 25  ~  5.17 : (교통영향평가 대행자)사전검토 의견 설계보완

ㅇ '22. 5. 19  : 관계자 현장회의 / 교통영향평가 보완서 제출 및 심의 요청(→ 교통정책과)

*************************************************

다. 검토결과*************************

**************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************

********************************

ㅇ (차량 진출입 램프)곡선부 선형 개선(진입 R : 4.5m→6m, 진출 R : 8m→10m) 및

차량 램프 시·종점부 평탄부 6m 이상 확보 등

ㅇ (지하3층 하역공간)진출·입통로 폭원 확폭(8.5m→10m), 곡선 램프 폭원 변경(7m→10m)

ㅇ (주차차단기)지상층(입차), 지하4층(출차)계획하고, 차로 폭원 3m 이상 및 대기공간    5m 이상 확보 등

라. 기타사항

*******************************************

************************************

***************************************************

************************

************************************************

*************************************************

***************************************************

**************************************************

*************************************************

*********

*****************************************************

*****************************************************

*********************

ㅇ 아울러, 향후 시설물 운영·사용 시, 추가 안전 확보를 고려하여 인근 학교 등·

하교 시간대별 동 시설물 이용차량에 대한 출입 통제 및 교통 안전요원(신호수)

배치방안 등 검토

********************************

************************* 끝

주무관	박춘복		애니산업지원팀장	김성미		미디어콘텐츠산업과장	전결 05/30
은용경
협조자
시행	미디어콘텐츠산업과-22158	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 서소문로 124, 서소문2청사 6층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-9224	/전송	02)768-8969	/	pcb7102@seoul.go.kr	/	부분공개(5)