투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰 (9호선 4단계 도시철도기본계획 수립 용역)

1. 도시철도계획부-4381(2020.05.21.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인 「9호선 4단계 도시철도기본계획 수립 용역」과 관련하여 아래와 같이 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 9호선 4단계 도시철도기본계획 수립 용역

2) 계약업체 : ㈜신성엔지니어링 외 6개사

3) 계약기간 : 2018. 9. 6. ~ 2020.05.29.

4) 계약금액 : 금713,240천원

나. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	713,240,000원	725,450,000	(증) 12,210,000원
용역기간	’18.09.06.~’20.05.29.	’18.09.06.~’20.08.31.	약 3개월 연장

다. 변경사유

****************************************

라. 예산과목

- 도시철도 건설, 도시철도 건설사업, 도시철도 9호선 4단계 건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 및 준공기한 연기 검토보고서 및 첨부물 각 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	박현우		계획과장	김동철		도시철도계획부장	05/21 김용학
협조자
시행	도시철도계획부-4393	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 10층	/
전화	02)772-7131	/전송	02)772-7304	/	hwpark5672@seoul.go.kr	/	부분공개(5)