문서번호	도시철도계획부-6562
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		계획과장	도시철도계획부장
박강수		김동철	08/13 代김동철
협조
	주무관		이경훈

- 진접선 복선전철 건설사업에 따른 -

국토교통부 총사업비 협의 결과보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

- 진접선 복선전철 건설사업 -

국토교통부 총사업비 협의 결과보고

진접선 복선전철 건설사업의 차량기지 건설을 위한 공사비 및 감리비에 대한 총사업비 자율조정 사항에 대하여 국토교통부와 협의하고 결과를 보고 드림

□ 회의 개요

○ 일  시 : ‘21. 8. 10.(화) 14:00~15:30

○ 장  소 : 국토교통부 재정담당관실

○ 참석자

- (도시철도계획부) 진접선 총사업비 담당자 2명

- (기획재정부) *******

○ 목 적 : 총사업비 관리지침 제100조에 따른 물가변동 및 문화재 시발굴비, 시설부대비 변경(증)에 따른 총사업비 변경 협의

□ 회의 내용

〔자율조정 협의내용〕

○ 차량기지(1,2공구) 공사 물가변동(E/S)***

****************증)13,818백만원

***************************** ****************************** ********************************* ***************************	***************************** ****************************** ********************************* ***************************
***************************** ****************************** ********************************* ***************************	***************************** ****************************** ********************************* ***************************

○ 차량기지(1,2공구) 감리 물가변동(E/S) 반영

- 차량기지 감리비 :**********

*************************** ****************************** ********************************* ***************************	************************** ****************************** ********************************* ***************************
	************************** ****************************** ********************************* ***************************

○ 차량기지(2공구) 문화재 시ㆍ발굴비 반영

- 문화재 시ㆍ발굴비 : *********

ㆍ「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」제15조(학술 자문회의)에 따른 문화재(학술자문회의) 심의결과 정밀발굴을 위한 정밀발굴면적(A=7,539㎡)이 통지되었기 매장문화재 조사비용이 증가함.

○ 공사비 증액에 따른 부대비 조정

- 시설부대비 : ********

ㆍ********************

ㆍ*******************************************

〔국토교통부 보완사항〕

○ ************************************************************************출

○ **********************************************************

○ *******************************************************************************

□ 조치의견

○ 사업주관부서(도시철도 토목부)에 국토교통부의 요청사항을 보완제출토록 통지하고 제16차 자율조정 완료후 차량기지 총사업비 변경을 위한 자율조정을 신청하고자 함.

붙임  총사업비 조정요구 자료 1부.  끝.