투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	계약 변경 체결 통보(오금지하차도 진입차단시설 설치공사)

1. 기전과-22159(2022.5.30.)호와 관련입니다.

2. 아래와 같이 계약 변경 체결하고 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 명: 오금지하차도 진입차단시설 설치공사

구 분	변경전	변경후	변경사유
준공기한	2022. 5. 31.	2022. 6. 30.	지하 콘크리트 구조물 발견되어 구조 검토 및 설계 수정으로 연장

나. 계약상대자: *****************

다. 계약금액: *************

라. 계약일자: 2021. 12. 15.

마. 변경사항

바. 계약변경일 : 2022. 5. 30.

붙임  1. 공사변경계약서 1부.  끝.

	관 리 단 속 과 장
주무관	정동현		관리단속과장	05/30
홍승용
협조자	주무관	이정선
시행	관리단속과-22365	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 강서구 양천로 237	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2657-7913	/전송	(02)2657-7950	/	finejdh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)