투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	변경계약(정산) 의뢰(2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사)

우리 본부에서 추진 중인 『2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사』에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사

2. 공사기간: 2021. 10. 13. ~ 2022. 5. 31.

3. 계약금액: *************

4. 계 약 자: ****************

5. 변경사유

- 현장여건 상이 및 이용편의 도모를 위한 사항 변경

- 관련계획 수립 등 여건 변동에 따른 사업계획 변경

- 기타 제경비(보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비 등) 정산에 따른 금액 조정

6. 변경금액

구 분		금 액(원)		증․감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	**	*******
	부가세	**********	**********	**	******
	도급비계	***********	***********	**	*******

7. 예산과목: 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 주차장 운영, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.

	공 원 부 장
주무관	이호연		공원시설과장	양돈욱		공원부장	05/30
김상국
협조자	주무관	조승만		기획예산과장	김영창		총무과장	代유문선
시행	공원시설과-21174	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0842	/전송	02-3780-0745	/	norton11@seoul.go.kr	/	부분공개(5)