문서번호	설비부-23921
결재일자	2022. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	05/31
		김호성

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』

관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 검토보고

2022. 5월

도시기반시설본부

(설 비 부)

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』

관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 검토보고

『광역소공인특화지원센터 건립 통신공사』와 관련하여 감리단으로부터 제출된 관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 요청건에 대하여 검토보고 드림.

1
		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

○ 규    모 : 지하 2층/지상 7층, 연면적 2,711,51㎡

○ 계약현황

(단위 : 원)

차 수	계약금액	계약기간	비 고
총 차	***********	*************************
1 차	*********	*************************
2 차	***********	*************************

○ 계약업체 : *****************

○ 건설사업관리단 : ************************

2
		관 련 근 거

○ 건설사업관리단 관급자재 납품기한 연기 검토보고

(광역CM-0326, 2022.05.23.)

○「물품 다수공급자계약 특수조건」제26조(납품기한의 변경) 제2항

: 수요기관의 불가피한 사정이 있는 경우에는 계약상대자의 요청 없이도 납품기한을 2회에 한하여 연기할 수 있다.

3
		검 토 내 용

○ 납품기한 연기내용

품 명	(납품요구번호) 계약번호	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당초	변경(연기)
영상감시장치	**************** *****************	*******	**********	**********	**********

○ 납품기한 연기 사유

********************************************************************

○ 건설사업관리단 검토의견

**********************************************************

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

4
		보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 통보하여 납품기한 연기 조치하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.