투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	납품기한 변경 요청(신답지하차도 진입차단시설 구매설치)

1. 기전과-21796(2022.5.31.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인「신답지하차도 진입차단시설 구매설치」에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 신답지하차도 진입차단시설 구매설치

나. 변경내역

연번	납품요구번호	계약업체	계약금액 (원)	구매품목	납품기한
					당초	변경
1	****************	*********	**********	***	2022.03.29 ~ 2022.06.05	2022.03.29 ~ 2022.07.29
2	****************	*********	**********	*********
3	****************	*********	**********	************
4	****************	******	*********	********
5	****************	*******	*********	**********
6	****************	*****	*********	******

다. 변경사유 : 굴착협의 지체로 선행공정(토목) 공사일정 지연에 따른 설치시기 미도래

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  납품기한 연기 검토 보고 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	강혜지		주무관	문준호		기전과장	05/31
문동하
협조자
시행	기전과-21807	(	2022.05.31	)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	02-2210-1536	/	rkd94124@seoul.go.kr	/	부분공개(5)