투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	방재시설부장
(경유)
제목	국회대로 1단계 신규공종 (임시가로등, 임시신호등 설치) 반영 협조 요청

1. 이산 2022-국회대로(건)-139호 (2022.5.26.) 와 관련입니다.

2. 「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 공사」 진행과 관련하여 전기공사의 일부

(임시가로등 및 신호등설치등)에 대해 병행시공이 필요하나 전기 본공사 시기('23년 하반기)와

상당한 간격이 있어, 감리단 검토의견을 토대로 공사의 시급성과 불필요한 간접비 발생을

방지하고자 금번 발생한 전기공종을 토목공사에 우선 반영하여 공사를 시행하는것을

요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 전기공사 발주 예정일 : '23년 하반기 예상

붙임  건설사업관리 기술자 검토 의견서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	최환수		건축설비과장	배수웅		설비부장	05/31
김호성
협조자
시행	설비부-23931	(	2022.05.31	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/	chs0914@seoul.go.kr	/	부분공개(5)