문서번호	기전과-21796
결재일자	2022. 5. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		문동하	05/31
			이경우
협 조
	주무관			代김학민

「신답지하차도 진입차단시설 구매설치」

납품기한 연기 검토 보고

2022. 5.

성동도로사업소

(기 전 과)

「신답지하차도 진입차단시설 구매설치」

납품기한 연기 검토 보고

「신답지하차도 진입차단시설 구매설치」 시행 중 선행공정 일정 지연에 따른 납품기한 변경사항에 대하여 검토하여 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 신답지하차도 진입차단시설 구매설치

ㅇ 계약금액 : *************

ㅇ 계약업체 : ***************

ㅇ 사업내용 : 진입차단시설 및 CCTV 설치, 원격감시제어 구축 등

ㅇ 납품기한 : 2022. 3. 29. ~ 6. 5.

□ 납품기한 연기검토

ㅇ 연기사유

- 서울교통공사 협의 지체로 선행공정(토목) 공사일정 지연에 따른 설치시기 미도래

ㅇ 변경 세부사항

연번	납품요구번호	계약업체	계약금액 (원)	구매품목	납품기한
					당초	변경
1	****************	*********	**********	***	2022.03.29 ~ 2022.06.05	2022.03.29 ~ 2022.07.29
2	****************	*********	**********	*********
3	****************	*********	**********	************
4	****************	******	*********	********
5	****************	*******	*********	**********
6	****************	*****	*********	******

ㅇ 귀책소재 : 성동도로사업소

ㅇ 지연배상금 : 미부과

□ 보고자 의견

ㅇ 공사협의 지연에 따른 절대납기 부족으로 납품기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단되므로 변경계약을 시행하여 공사 추진에 철저를 기하고자 함

□ 향후계획

ㅇ 2022. 5. : 납품기한 연기 요청(→ 관리단속과)

ㅇ 2022. 7. : 물품 납품 및 현장설치 완료.  끝.