“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[2022년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)] 2차 -최종

1. 우리 사업소에서 시행중인 “′21년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)-2차"에 대하여 계약물량 증·감 사항이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : ′21년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)-2차

나. 도 급 자 : 부기건설(주)  대표 오만택

다. 계약기간 : ′2021. 12. 13. ~ ′22. 6. 30.(총부기기한)

라. 설계변경 금액 : 385,049,500원(감2,141,900원)

구 분	당초 금액(원)	변경 금액(원)	비 고(원)
총부기금액	387,191,400	385,049,500	감)2,141,900
2차 부기금액	387,191,400	385,049,500	감)2,141,900

마. 설계변경 세부 내역

바. 설계변경 사유 : 계약물량 증,감 및 신규공종 발생 변경

사. 예산과목 - 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후밸브정비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배수지등시설물)

자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비, 유량계설치

소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설등의 설치 및                    관리, 일반회계, 소방용수시설설치․보수, 시설비

따로붙임 :  1. 설계변경 심의 결과 및 의견서 등 각 1부.

2. 설계변경 사유서(내역서) 각 1부.

3. 변경합의서(검증확인서 포함) 등 각 1부.  끝.

시설관리팀장	김재영		시설관리과장	김근태		행정지원과장	이영세		강남수도사업소장	05/31
代이영세
협조자
시행	시설관리과-23927	(	2022.05.31	)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)