문서번호	미디어콘텐츠산업과-22216
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	애니산업지원팀장	미디어콘텐츠산업과장	신성장산업기획관		경제정책실장
박춘복	김성미	은용경	배현숙		전결 06/02
					황보연
협 조
	예산5팀장			강민구

(구)서울애니메이션센터 재건축사업 예산변경 계획

2022.  5.

경 제 정 책 실

(미디어콘텐츠산업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

(구)서울애니메이션센터 재건축사업 예산변경 계획

(구)서울애니메이션센터 재건축사업의 원활한 추진을 위하여 건설사업관리용역

(2차)계약 등에 필요한 소요예산을 아래와 같이 예산 변경 사용하고자 함

Ⅰ		관련근거

ㅇ 예산재배정 및 예산과목 변경 요청

( 도시기반시설본부 건축부-23511호, 2022.05.20 )

ㅇ「(구)서울애니메이션센터 재건축사업 역사전시실 전시기획용역 시행계획」

( 미디어콘텐츠산업과-1350호, 2022.02.15 )

ㅇ「(구)서울애니메이션센터 재건축사업 발굴유구 해체 · 이전공사 시행계획」

( 미디어콘텐츠산업과-22010호, 2022.05.24 )

Ⅱ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : (구)서울애니메이션센터 재건축사업

ㅇ 규모및용도 : 지하4층, 지상3층, 연면적 15,385㎡ / 교육연구시설, 문화및집회시설 등

ㅇ 사업기간 : 2016. 5. ~ 2025. 9.

***************************************

Ⅲ		추진경위

ㅇ '15. 10. ~ '16. 5. : 사업 기본계획 및 세부 시행계획 수립

ㅇ '16.  8. ~ '19. 8. : 설계공모 및 설계용역

ㅇ '17.  7. ~ '22. 3.  : 매장문화재 표본조사, 시굴 · 정밀발굴조사, 문화재

관계전문가 자문, (문화재청)문화재위원회 심의 등

ㅇ '18. 12. ~ '19. 4. : 기존 건축물 철거(부지내 가설울타리 설치)

ㅇ '20.  3.  : 유구 확대보존 위한 변경방침 수립*************************

ㅇ '21.  8.  : 설계 보완용역 계약 및 착수(도기본)  ※ 용역기간 : '22 .8월까지

ㅇ '22.  1.  : 설계변경 추진계획 방침**************************

ㅇ '22.  2.  : 역사전시실 전시기획용역 계약 및 착수('22. 7월까지)

ㅇ '22.  3.  : 건설사업관리용역(1차) 변경계약***********************

ㅇ '22. 5.  : 예산재배정 및 예산과목 변경 요청(도기본→미디어콘텐츠산업과)

ㅇ '22. 5.  : 발굴유구 해체 · 이전공사 입찰공고 중('22. 6월  ~ 12월까지)

Ⅳ		예산 변경계획

*********

*********************************************

*****************************************

***************************************

*****************************************

**********************************************

***************************************************

□ 변경내용 및 조치계획

ㅇ '22년도 편성예산 중, 동일 세부사업 내 '시설비' 일부***********를,

******************************** 예산변경 사용(통계목 변경)

ㅇ 변경금액 ***********                           *********

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ		향후계획

ㅇ 예산변경 요청(미디어콘텐츠산업과 → 예산담당관)  : '22. 5월

ㅇ 예산 재배정(미디어콘텐츠산업과 → 도기본 건축부) : '22. 6월

붙임  1. 예산배정 요청서 1부.

2. (도기본)예산 재배정 및 예산과목 변경 요청서(및 계약서 사본)

3. (미디어콘텐츠산업과)전시기획 용역 및 공사 시행계획서 등.  끝