문서번호	역사문화재과-25061
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화재관리팀장	역사문화재과장
금석현		정진순	06/02
			이희숙
협조
	소장		황정로

남산골한옥마을 전기시설 보수공사 설계변경 검토보고

2022. 6.

문 화 본 부

(역사문화재과)

남산골한옥마을 전기시설 보수공사 설계변경 검토보고

우리시와 계약체결하여 시행중인 '남산골한옥마을 전기시설 보수공사'와 관련하여 현장여건에 따른 물량증감, 전기분전반 교체 등의 설계변경 사항이 발생하여 검토보고 함.

Ⅰ 사업개요

□ 공 사 명 : 남산골한옥마을 전기시설 보수공사

□ 공사기간 : 2022. 5. 18 ~ 2022. 6. 11

□ 공사금액 : ************

□ 공사내용 : 천우각 지중등 및 노후된 타임캡슐 십이지신등 교체

□ 공사업체 : *******************

Ⅱ 설계변경 내용

□ 주요변경내역

구분	품명	규격	수량		비고
			당초	변경
변경	전선관	ELP. 30C	65 M	20 M	현장여건을 고려하여 천우각 지중등 전선관로 일부 미굴착
	관로굴착	-	65 M	20 M
	경고테이프	250 x 200	65 M	20 M
	콘크리트 포장 절단	-	130 M	0 M
신규	분전반 교체	자립식 10회로	0 EA	1 EA	안전사고 예방을 위해 노후된 전기분전반 교체

□ 변경사유 : 현장여건에 따른 물량증감 및 전기분전반 교체 사항 반영

Ⅲ 공사금액 : ******************

Ⅳ 보고자 의견

□ 현장여건에 따른 물량증감 및 전기분전반 교체 등 변경사항에 대하여 본 사업의 공사금액 범위내에서 설계변경하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 설계 변경내역서(설계변경도면 포함) 1부.  끝.