문서번호	시설보수과-22121
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	06/03
			김용제
협조

『도림천복개(좌안)보수공사』

발주계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 06

강서도로사업소

[시설보수과]

『도림천복개(좌안)보수공사』

발주계획 검토 보고

2022년도 예산사업으로 추진 예정인『도림천복개(좌안)보수공사』에 대한 발주계획 검토 보고 임

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 도림천복개(좌안)보수공사

□ 위    치 : 신도림교 ~ 거리공원오거리

□ 사업개요 : 신축이음보수 316.7m, 교면포장 17.1a, 기타 1식

□ 사업기간 : 착공일로부터 180일간

□ 사 업 비 : 800백만원

※ 예산과목 : 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 도림천복개(좌안)보수,

시설비및부대비, 시설비

Ⅱ		그간 추진사항

□ 추진사항

○ 2020. 3.31.~11.25 : 정밀안전점검용역

- 종합평가 : B등급

- 공용성 확보등 내구성 향상을 위한 유지관리 필요

○ 2022년도 본 예산 : 500백만원

○ 2022년도 상반기 추경예산 : 300백만원

○ 2022. 4. 28 : 특정기술(공법) 선정심의 개최

○ 2022. 4. 29 : 특정기술(공법) 선정심의 결과보고

※ 공법명 : 일체형그리드부틸시트신축이음공법(특허 제10********호)

○ 2022. 5. 27 : 계약심사 의뢰

○ 2022. 6.  2 : 계약심사 결과 통보                       (단위:천원)

예산액	심사요청액	심사금액	조정액	조정률
800,000	716,199	693,572	22,627	3.16%

Ⅲ		추진계획

□  총 공사비 : 777,373천원

○ 도급비 : 693,572천원, 관급비 44,197천원, 이전비 39,604천원

□  발주방법

○ 일반경쟁입찰(지역제한) : 추정가격 10억미만 전문공사

※ 행정안전부 예규 제89호(2019.10.8.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장(제한입찰 운영요령)

□  입찰참가자격

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙

제14조 규정에의한 자격요건을 갖추고, 입찰공고일전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일)까지 주된영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 「건설산업기본법」에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업을 등록한 업체,

또는 전문건설업 중 콘크리트공사업과 포장공사업을 모두 등록한 전문업체,

또는 종합건설업 중 토목공사업(또는 토목건축공사업 허용)을 등록한 업체로서 입찰일(낙찰자는 계약 체결일)까지 계속 유지하여야 함.

※ 본 공사는 종합건설업과 전문건설업간 업역규제폐지 대상공사 임.

Ⅳ		향후계획

□ 2022. 6월 : 공사발주 및 공고

□ 2022. 6월 : 계약 및 착공

□ 2022. 6월 ∼ 12월  : 공사시행 및 준공

따로붙임  1. 공사설명서 1부.

2. 위치도및 현장사진 1부.  끝.