문서번호	토목부-24461
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	06/03
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교, 보차도교) 건설공사 - 설계변경(전체3회, 1차3회)검토 보고

2022. 06

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교, 보차도교) 건설공사 - 설계변경(전체3회, 1차3회)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량(보행교 및 보차도교) 건설공사 설계변경(전체3회, 1차3회) 검토결과를 보고 드림

1		근 거

○ 공사 설계변경(전체3회, 1차3회)검토결과 보고(보행교) - 감리부-22-00605호('22.05.25.)

○ 공사 설계변경(전체3회, 1차3회)검토결과 보고(보차도교) - 감리부-22-00606호('22.05.25.)

2		공 사 개 요

□ 보 행 교

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.02.)

○ 도 급 비 :  ************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 보차도교

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.05.16.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

3		설계변경 사유

□ 보 행 교

○ 실정보고 승인사항(3건) 및 설계변경 자문회의 소위원회(4차) 의견 반영

- '22.02.11. : 임시우회로 및 공사용 진입로 신규개설(도기본-22-1501)

- '22.03.07. : 지장물(가로등, 광케이블)이설 요청(도기본-22-2542)

- '22.03.29. : 지하철4호선 창동철교 구조물 정밀안전점검(도기본-22-3481)

□ 보차도교

○ 실정보고 승인사항(5건) 및 설계변경 자문회의 소위원회(4차) 의견 반영

- '22.04.08. : 공사구간 내 산책로 및 자전거 우회도로 개설(도기본-22-402)

- '22.02.11. : 가도 및 임시우회도로 가배수로공 수량변경(도기본-22-1501)

- '22.02.11. : 가도설치 순성토운반 및 교각단부 흙쌓기(도기본-22-1501)

- '22.02.11. : 임시우회도로 보행자 보호시설 설치(도기본-22-1501)

- '22.02.22. :  A2 가시설 앞성토 및 강관파일 그라우팅용 시멘트 공급방법 변경

(도기본-22-2542)

○ 물가변동 반영

- 조정기준일 : 2021.06.24. 조정율 : 6.76%(도기본-21-13646, '22.10.27)

- 조정기준일 : 2021.09.23. 조정율 : 3.15%(도기본-21-16836, '21.12.31)

4		설계변경 내역

□ 공사비 증·감 내역

○ 보 행 교 : 증) 477,687천원

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감
총 차	총공사비	**************	**************	**************
	도 급 비	*************	**************	**************
	관급자재대	*************	*************	**************
	이전비(폐기물처리비)	*	*************	**************
금차(1차)	총공사비	*************	*************	**************
	도 급 비	*************	*************	**************
	관급자재대	***********	***********	**************
	이전비(폐기물처리비)	*	**********	**************

○ 보차도교 : 증) 923,284천원

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감
총 차	****	**************	**************	*	***********
	*****	**************	**************	*	************
	*****	*************	*************	*	************
	***********	*	************	*	*************
금차(1차)	****	*************	*************	*	************
	*****	*************	*************	*	************
	*****	*************	*************	*	************
	***********	*	************	*	*************

□ 주요공종 증·감 내역

○ 보 행 교

(단위 : 천원)

공 종	전체 3회			1차 3회			비고
	당 초	변 경	증. 감	당 초	변 경	증.감
토 공	*******	*******	*	*******	*******	*
2. 구조물공	*******	*******	*	*******	*******	*
3. 상부공	*********	*********	*	*******	*******	*
4. 가시설공	*******	*******	*	*******	*******	*
5. 부대공	*********	*********	*******	*******	*******	*******
6. 운반공	*****	*****	*	*****	*****	*
7. 사급자재	*******	*******	*	*******	*******	*
직접비 계	*********	*********	*******	*********	*********	*******
간접비	*********	*********	******	*******	*******	******
물가상승(K1=6.76%)	*******	*******	*	*******	*******	*
물가상승(K2=3.15%)	*******	*******	*	******	******	*
제경비제외공종	*******	*******	*******	******	*******	*******
공급가액	*********	*********	*******	*********	*********	*******
부가가치세	*******	*******	******	*******	*******	******
도 급 액	*********	**********	*******	*********	*********	*******

○ 보차도교

(단위 : 천원)

공 종	전체 3회			1차 3회			비 고
	당 초	변 경	증. 감	당 초	변 경	증. 감
A.보차도교	*********	*********	*******	*********	*********	*******
토 공	*******	*******	*	******	******	*
2. 구조물공	*********	*********	*	*******	*******	*
3. 상부공	*********	*********	*	*********	*********	*
4. 가시설공	*******	*******	*	*******	*******	*
5. 부대공	*******	*********	*******	*******	*******	*******
6. 기존구조물 철거 및 복구	*****	*****	*	*****	*****	*
7. 운반공	******	******	*	*****	*****	*
8. 사급자재	*******	*******	******	******	******	******
B.램프교	*********	*********	*****	*	*****	*****
램프교 시점	*******	*******	*****	*	*****	*****
2. 램프교 종점-1구간	*******	*******	*****	*	*****	*****
3. 램프교 종점-2구간	*******	*******	***	*	***	***
직접비 계	*********	*********	*******	*********	*********	*******
간접비	*********	*********	*******	*********	*********	*******
물가상승(K1=6.76%)	*******	*******	*****	*******	*******	*****
물가상승(K2=3.15%)	*******	*******	******	*******	*******	******
공급가액	**********	**********	*******	*********	*********	*******
부가가치세	*********	*********	******	*******	*******	******
도 급 액	**********	**********	*******	*********	*********	*******

5		조 치 계 획

○ 건설사업관리단 설계변경 보고 내용은 적정한 것으로 판단되며 상기 검토

결과와 같이 설계변경(전체 3회, 1차3회) 및 변경계약을 시행 하고자함

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 각 1부. 끝.