문서번호	한양도성도감-22287
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		이원재	06/03
			김홍진
협조

관급자재(공기순환기) 변경계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

문 화 본 부

(한양도성도감)

관급자재(공기순환기) 변경계획 보고

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사)

한양도성도감과장 :김홍진☎2133-2671 도성관리팀장 :이원재☎2670 담당 : 왕승찬☎2671

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」전시안내실에 필요한 관급자재(공기순환기)를 계약하였으나 제품규격에 착오가 있어 변경구매를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 전시안내센터 건축개요

· 규 모: 지상 1층, 연면적 223.9㎡,

· 용 도: 안내실, 관리실, 전시실, 화장실

□ 공사계약 내용

· 시 공 자: 원택건설㈜ 외1

· 계약금액: 1,308,757천원

· 공사기간: 2020.4.30. ~ 2022.9.20.  ※ 현재 골조공사 완료

Ⅱ		관급자재 변경계획

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공기순환	공기순환장비(설치비 포함) 350㎡/h, 2대, 150㎡/h, 2대,	공기순환장비(설치비 포함) 150㎡/h, 7대	천정높이 확보를 위해 규격변경
	350㎡/h의 제품높이 393mm → 150㎡/h의 제품높이 265mm
냉난방기	4방향 천청형 장비 및 설치	변경없음
소요예산	28,502,200원 (조달수수료 153,080원 포함)	34,284,070원 (조달수수료 184,130원 포함)	증)5,781,870

□ 구매자재 소요예산: 34,284,070원(조달 수수료 184,130원 포함)

□ 관급자재 변경 사유

- 전시공간의 천정 설계높이 2.55m를 충족시키기 위해 제품변경

- 설계된 제품이 친환경 제품이 아니므로 동일한 용량의 친환경 제품을 관급자재로 구매하였으나 제품의 규격확인 착오로 변경구매함

(계약제품 높이 393mm → 변경제품 높이 265mm)

□ 설치시기: 공사일정에 따라 6~7월경 설치예정

※ 천장형 냉·난방기와 공기순환기 녹색인증 제품임

□ 감리원 검토의견: 천정높이(2.55m) 마감 확보

냉·난방 효율성 동등 이상이므로 적정함

□ 예산과목: 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비

Ⅲ		향후계획

□ 재무과에 관급자재(공기순환기) 변경구매를 요청하고 건축공사 일정에 따라 납품·설치토록 하고자 함 (6~7월 설치예정)

붙임  1. 관급(공기순환기)자재 수급관리조서(변경) 1부

2. 나라장터 관급자재 조사(공기순환기) 1부

3. 관급자재 변경내역서(공기순환기)  1부.

4. 감리의견서 공기순환기 변경 검토 1부.  끝

5. 조달물품 매입요구서(공기순환기 변경) 1부.