문서번호	시설보수과-22063
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
김규춘		최재영	06/02
			임형규
협조

가리봉철도고가외 4개소 정밀안전점검및실태조사용역

착수보고회 개최결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 05

강서도로사업소

시설보수과

가리봉철도고가외 4개소 정밀안전점검및실태조사용역

착수보고회 개최 결과보고

우리 사업소에서 추진중인 「가리봉철도고가외4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역」에 대한 착수보고회 개최결과 보고임.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 가리봉철도고가외4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역

(가리봉철도고가,공단IC,구로역지하차도,가마산지하차도,여의하류지하차도)

○ 용역기간 : 2022. 4. 29. ~ 2022. 12. 24.

○ 용 역 비 : 121,706천원

○ 용 역 사 : ㈜삼림엔지니어링 대표 최 현

Ⅱ		착수보고

○ 일 시 : 2022.5.31(화)14:00 ○ 장 소 : 시설보수과 사무실 ○ 참석자 : 4명 - 용역사2, 시설보수과장, 담당자 ○ 보고내용 - 과업개요, 전차이력사항, 과업수행방법, 중점점검사항, 안전관리등 교통처리계획	<보고회 사진>

Ⅲ		주요검토결과

○ 전차용역 보고서를 활용하여 손상진행여부, 보수부 재손상 등을 비교하여 외관조사망도 작성 및 적절한 보수・보강 방안을 제시

특히, 강도시험등에 관하여 이전 시험위치를 파악하여 가급적 동일위치상 시험을 실시하고 그 결과를 확인할 것.

○ 중대결함 등 긴급사항 발견시 즉시 유선 또는 서면 보고할것.

- 외부 외장재(타일,화강석판등) 및 콘크리트 박락등 탈락위험요인

조사하여 사전 위험요인 제거할 수 있도록 조치할것.

○ 현장 재료시험시 시설담당자 합동으로 참여할 수 있도록 사전보고할 것

○ 시설물별 중점관리 지점, 점검동선 등 로드맵을 작성하여 제출

○ 부속시설물, 첨가시설물, 점용시설에 대하여 일제조사 하여 이상유무 및 설치현황을 위치도와 사진에 기록하여 제출

○ 보수・보강공사 추진구간에 대하여 하자발생 여부를 상세히 조사하고 하자보수가 이루어 질 수 있도록 위치별 물량을 작성하여 제출

○ 붕괴유발부재 및 중점관리부재는 체크리스트에 의거 점검할 수 있도록 위치별 주요사진을 첨부하여 작성 및 제출

○ 안내표지판 설치, 점검자의 안전복 착용 등 안전사고예방 철저

○ 외관조사를 7월 이전에 완료(소요예산 파악 제출, 익년사업예산 편성)

○ 터널구간의 누수가 없는지 확인하고 누수로 인한 고드름 발생여부 및 처리방안을 검토하여 보고서에 수록할것.

○ 보수・보강 금액 산출시 최근 서울시 공통대가 및 표준품셈 기준으로 작성

○ 노면 체수여부조사는 비온직후 조사하여 사진과함께 보고서에 수록할것.

Ⅳ		향후계획

○ 착수보고회 검토결과 주요 보완사항 용역사 통보

○ 시설물별 외관조사 및 콘크리트 재료시험 : 2022.6월~9월

○ 중간보고회 및 자문회의 : 2022.9월

○ 상태평가 및 안전등급 산정 : 2022.9월

○ 보수·보강 및 유지관리방안 제시 : 2022.10월

○ 최종보고회 및 자문회의 : 2022. 11월

○ 종합보고서 작성 및 준공 : 2022.12월

따로붙임  착수보고회 자료 1부.  끝.