코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리부서에서 추진중인 타당성조사 용역과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 용 역 명 : 용마산로 지하화 타당성조사 용역

○ 계 약 자 : (주)진우엔지니어링코리아

○ 변경내용 : 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한 연기	2021.09.09.~2022.06.08.	***********************

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 연기사유 : ***********************************

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.
2. 준공기한 연기방침서 1부.
3. 합의각서 1부.  끝.

	도 로 계 획 과 장
주무관	정유빈		도로공간계획팀장	전기현		도로계획과장	06/03
임창수
협조자	계약1팀장	원종순
시행	도로계획과-23016	(	2022.06.03	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 10층 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	kdmlqls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)