문서번호	설비부-24162
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로설비과장		설비부장
박근형		문학준		06/07
				김호성
협 조

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사(6차)』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사(6차)』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사(6차)』관련, 건설사업관리단으로부터 현장여건 변경 및 유관기관 요청사항 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사(6차)

○ 위    치 : 종로구 권농동 8(창덕궁 돈화문) ~ 종로구 원남동 166

○ 규    모 : 도로확장 폭 4차로 → 6차로, 연장 810m(터널 320m)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	********* *****	**	*************************	*************
		**	*************************	***********

○ *********************

2		관련근거

○ 중부공원녹지사업소 설비분야 협의 [('22.01.12.)] : 공원등 회로구분 및 분전반 위치변경

○ 북부도로사업소 설비분야 협의 [('22.02.04.)] : 승강기 전원은 전기실에서 공급 반영

○ 전기공사(6차) 실정보고 사항에 대한 검토 보고 [율곡감 제2022-188호 ('22.04.29.)]

3		검토내용

○ 공원등 회로 구분(2회로 → 4회로)

- 상부 공원 야간 미개방시 에너지절약을 위한 공원등 회로 구분 필요함.

○ 분전반 설치 위치 변경

- 유지관리 편의성을 위해 상부 보행로 내부에 분전반 설치 필요함.

○ 승강기 전기 인입 전력케이블 반영

- 유지관리 편의성을 위해 승강기 전원은 전기실에서 공급 필요함.

○ 기타 전기공사 변경내용

- 창경궁관리소 요청사항으로 차단기박스 및 전기맨홀 설치 필요함.

- 매표소 전기 인입장소 위치 변경(화장실 → 창경궁 전기맨홀)

○ 주요 변경내역

공종	주요 변경내역						직접비 (단위:천원)
	품명	규격	단위	당초	변경	증·감
***** **** ****	***** ****	******	*	**	*	***	* * **********
	************	******	*	***	***	***
	************	******	*	***	***	***
	******	**************	*	***	****	***
	******	***********	*	***	***	***
	******	***********	*	***	*	****
	******	***********	*	***	***	***
	******	***********	*	*	***	***
	***	*********	**	**	**	*
	***	***********	**	*	**	*
	*****	*******	*	*****	*****	**
	****	***************	*	*	*	*
******							*********

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현장여건 및 유지관리기관(중부공원녹지사업소, 북부도로사업소) 요청사항을 반영하여 변경 시공함이 타당하다고 판단되며, 실정보고에 대한 검토결과 적정함.

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.