문서번호	생태환경과-21080
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	생태환경과장	공원부장
김정화	이성일	06/07
		김상국

「2022년 잠실 한강숲 조성공사」 공사현장 실정사항 검토보고

「2022년 잠실 한강숲 조성공사」

공사현장 실정사항(1차) 검토보고

2022.  6.

공  원  부

(생태환경과)

「2022년 잠실 한강숲 조성공사」

공사현장 실정사항(1차) 검토보고

한강의 자연성을 회복하고자 시행 중인「2022년 잠실 한강숲 조성공사」와 관련, 서울시설공단의 공사현장 실정사항(1차) 승인요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고드림.

※ 공사감독3처-4095(2022.05.27.)호

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 잠실 한강숲 조성공사

ㅇ 공사기간 : 2022.04.25.~ 2022.07.23.

ㅇ 공사내용 : 이팝나무, 참느릅나무 등 14종 7,780주 식재

ㅇ 도 급 비 : **********************************

ㅇ 도 급 사 : ******************

ㅇ 공사감독 : 서울시설공단(공사감독3처)

□ 현장 실정사항 및 검토결과

구 분	현장 실정보고 내용	검토결과	비 고
철거 및 수목 제거	○ 제1주차장 녹지대내 신규 수목 식재를 위해 기존 고사목 뿌리 제거 필요	○ 고사목 뿌리제거 반영. - 수목뿌리제거: 1주→3주	승 인
	○ 기존 사각등의자가 기초 포함 세트로 제작되어 있어 철거 후 재설치 불가	○ 기존 사각등의자 존치 - 사각의자 철거 후 재설치: 1개소→0개소	승 인
관급 자재	○ 식재수목 중 작은 규격(R8)의 수목에 통기관 2개씩 설치토록 과다설계	○ 수목규격R8에 계획된 통기관 제외 - 생육삼통관: 684EA→426EA	승 인

구 분	현장 실정보고 내용	검토결과	비 고
수목 식재	○ 기존 사각등의자 내부에 그늘목 식재 필요	○ 주변 녹지 내 식재수종인 느릅나무 추가식재 - 느릅나무(H4.5×R18): 0주→1주	승 인
	○ 제1주차장 녹지 내 고사목(회화나무)제거 및 추가 식재 필요	○ 주변 녹지 내 식재수종인 팽나무 추가식재 - 팽나무(H5.0×R20): 33주→35주	승 인
	○ 1호매점 화장실 뒤편으로 관목 식재계획이나, CCTV 전기 배관공사가 계획되어 식재불가	○ 계획되어 있는 사철나무 제외 - 사철나무(H1.0×W0.3): 370주→0주	승 인
	○ 소나무(군식) 식재구간 경관식재 필요	○ 소나무 식재지 전면부(자전거도로 및 산책로)에 철쭉류 식재 - 자산홍(H0.3×W0.3): 0주→750주 - 영산홍(H0.3×W0.3): 0주→750주 - 백철쭉(H0.3×W0.3): 0주→750주	승 인
	○ 메타세콰이어 식재구간 일부가 다른 수종과 혼재되어 있어 통일성을 고려하여 식재 위치 변경 필요	○ 메타세콰이어(5주) 식재위치 변경 - 제1주차장으로 위치 변경	승 인
	○ 자전거도로와 산책로 사이의 띠녹지 구간에 이팝나무(12주)를 열식하도록 계획 되었으나, 지표로부터 50CM이내에 가로등선, CCTV선이 매설되어 있어 교목식재 불가	○ 이팝나무(12주) 식재위치 변경 - 2호매점 인근으로 위치변경(5주) - 생태숲 구간으로 위치변경(7주)	승 인

□ 계략 공사비

***********************************

**********************************

**********************************

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
총 공사비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부 가 세	**********	**********	*********
	소계	***********	***********	**********
관급비	관급자관급	*********	*********	*
	도급자관급	**********	**********	**********
	소계	**********	**********	**********

□ 보고자 검토의견

ㅇ 서울시설공단의 공사현장 실정사항(1차) 승인요청에 대하여 위와 같이 승인통보 및 시공하고, 추후 설계변경 반영 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사 실정사항(1차) 승인요청 공문 1부.  끝.