문서번호	시설운영과-22226
결재일자	2022. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
김자겸		배효성	06/08
			한정훈
협 조

서울식물원 안내체계 개선 추진계획

서울식물원 안내체계 개선 추진계획

2022. 6.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

서울식물원 안내체계 개선 추진계획

서울식물원 내•외부 안내체계를 종합적으로 개선하여 식물문화센터 및 공원 방문객의 안전성 및 이용편의성을 증대시키고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

○ 안내시설의 인식성 및 설치수량 부족으로 이용불편 민원이 증가함에 따라 방문객이 한눈에 알아볼 수 있도록 종합적 안내체계 개선 필요

○ 중대재해처벌법 시행에 따라 관람동선 및 피난안내 등 안내시설 설치를 보완하여 중대시민재해 발생 예방 필요

○ 공원 외부 공공교통시설물(지하철 역사 등)에 안내시설물 설치를 검토하여 공공교통을 이용하는 방문객의 이용편의성 증대 필요

Ⅱ		시 설 개 요

○ 위    치: 서울시 강서구 마곡동로 161(마곡동 812번지)

○ 시설규모

- 공 원(근린공원): 504,012㎡

- 건축물(식물문화센터): 지하2층∼지상4층, 연면적 26,956㎡

- 건축물(부속건축물): 어린이정원학교 등 12개동, 연면적 4,355㎡

○ 안내시설물 설치 현황

- 공 원: 공원명표지(600w) 3개소, 계도사인A,B 17개소, 종합안내(200w) 5개소, 구역안내(200w) 6개소, 이정표 16개소, 입구사인 6개소, 주차장사인 1개소 등

- 건축물: 식물문화센터 내 위치안내도 3개소

Ⅲ		사 업 내 용

□ 디자인설계 용역

○ 건축물 안내체계 수립(식물문화센터)

- 건축물 내 위치안내도, 피난안내도, 실안내도 등 설치위치 선정 및 디자인 설계

○ 온실 내부 관람체계(동선) 수립

- 주요 관람시설인 온실에 대한 관람체계(동선) 계획 수립 및 안내도 디자인 설계

○ 공원 안내체계 개선

- 총괄 안내판 계획: 공원 주요 출입부에 공원 전체를 파악할 수 있는 안내물 제시 및 디자인 설계(대형 디지털 전광판, 입구 대형 게이트 설치 등)

- 공원 내 안내판 보완: 기설치 안내판 내용수정 및 디자인 설계, 공원 부출입구 등 안내판 추가 설치 제시 및 디자인 설계

- 공공교통시설 내 안내판 설치: 서울식물원 주변 공공교통시설물***********************에 공원 안내표지판 설치계획 수립 및 디자인 설계

○ 기타 안내체계 개선: 부속건축물 등 기타 필요 안내시설 설치 제시 및 디자인 설계

※ 설계진행 중간보고(2회): 용역 착수 후 1개월 이내 1회, 용역 착수 후 2개월 이내 1회

□ 안내시설물 설치공사

○ 세부 공사내용 및 개략공사비

구 분		면 적 (㎡)	개소	*** ****	내 용
건축물 안내체계 수립 (식물문화센터)		26,957		******	건축물 내 위치 및 방향 안내도 설치 피난안내도 설치 실 안내표시 설치 등
내부 관람체계(동선) 수립 (온실)		7,891		******	온실 내 관람동선 안내도(바닥) 설치 등
공원 안내 체계 개선	총괄 안내판 설치	504,012	2	*******	예시) 대형 디지털 전광판 설치 예시) 입구 대형 게이트 설치 등
	공원 내 안내판 보완			******	기존 설치 각종 안내판 내용수정 및 내용물 교체, 훼손부위 보수 주요 부출입구 안내판 설치 등
	공공교통 시설 안내판 설치	공원 외부	4	******	******************* ******************* *************
기타 안내체계 개선		4,355	1	*****	부속건축물 내 필요 안내시설 설치 등
합 계				*******

※ 위 공사비는 개략공사비를 산정한 것으로 공사내용 및 개소수, 금액 등은 변경될 수 있음. 최종 공사내용 및 공사비는 설계 산출내역서에 따라 변경하여 공사 시행

Ⅳ		소 요 예 산

○ 예산계획*************

(단위: 천원)

계	디자인설계 용역	안내시설물 설치공사
		건축물 안내시설	온실 안내시설	공원 안내시설		공공교통 안내시설
				총괄 안내판	안내판 보완
*******	******	******	******	*******	******	******

※ '안내시설물 설치공사'는 공사내용에 따라 구분한 것으로, 공사 시기 및 공사 수행 전문업체를 감안하여 분리하여 발주 예정

○ 예산과목: 서울식물원 시설운영과, 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영, 서울식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물원 시설 유지관리 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

※ 낙찰차액은 설계변경 등 발생으로 필요시 공사비로 활용

Ⅴ		발 주 계 획

□ 설계 용역

○ 디자인설계 용역

- 용역기간: 착수일로부터 3개월(90일)

*********************

※ 관련법규: 「지방계약법 시행령」제25조제1항제5호

- 자격기준:「건축사법」제23조에 따라 건축사사무소를 등록한 업체 또는 동등 이상의 디자인설계 관련 사무소를 개설한 업체

□ 시설물 설치공사

○ 건축물 및 온실 안내시설물 설치

- 공사기간: 착수일로부터 2개월(60일)

*********************

※ 관련법규: 「지방계약법 시행령」제25조제1항제5호

- 자격기준:「건설산업기본법 시행령」제7조에 규정에 의한 관련 전문건설공사업(도장공사업 등) 면허를 보유한 업체

○ 공원 및 공공교통시설 내 안내시설물 구매 설치

- 공사기간: 착수일로부터 2개월(60일)

****************************************

※ 관련 물품 구매 불가능 시 별도 발주방식을 통하여 시행

※ 공공교통시설 내 안내시설물 설치는 관련 시설물 운영기관 협의 및 동의가 필요한 사항으로, 협의 결과에 따라 시행 여부 및 방식 결정

Ⅵ		향후 추진일정(예정)

○ 2022.06.13.∼06.17.  디자인설계용역 계약 체결

○ 2022.06.20.∼09.19.  디자인설계

○ 2022.09.20.∼09.30.  안내시설물 설치공사 계약 체결

○ 2022.10.01.∼11.30.  안내시설물 설치

붙임 : 디자인설계용역 과업내용서 1부.  끝.